문서번호	도로보수과-2324
결재일자	2018.3.20.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		도로보수과장	북부도로사업소장
조지웅		김학동	03/20 신응수
협 조

『도로 시인성 및 도시 미관 개선을 위한』

무단횡단금지시설 정비 계획 보고

2018 . 3.

북부도로사업소

(도로보수과)

『도로 시인성 및 도시 미관 개선을 위한』

무단횡단금지시설 정비 계획 보고

해빙기 및 봄맞이 환경정비를 대비하여 도로부속물 일제점검 결과 무단횡단금지시설 보수가 필요하여 정비계획을 아래와 같이 보고드림.

Ⅰ		개 요

□ 추진 근거

○ 2018년 새봄맞이 대청소 추진계획(생활환경과-3284호)

○ 해빙기 대비 교통안전 부속물 정비 지시(교통운영과-1120호)

○ 해빙기 도로·교통안전 부속물 정비계획(도로보수과-1412호)

□ 필 요 성

○ 파손으로 인하여 무단횡단금지시설의 역할을 못함

- 파손된 시설물 보강이 필요한 상황

○ 시설물 색바램 및 반사지 오염 등으로 시인성 불량

- 시인성 불량으로 시설물 파손이 잦음 (1주일 평균 7경간 파손)

파손이후 보강이 필요한 시설물	시인성 불량

Ⅱ		추진 계획

□ 정비대상

(단위 : 경간)

연번	도로명	설치구간	합계	시인성 불량	파손	비고
1	도봉로	수유역버스정류장	24	24	8
2	도봉로	롯데시네마 수유점	27	23	4
3	도봉로	수유사거리~미아역방향	2	-	2
4	도봉로	궁전회관 앞	1	-	1
5	도봉로	신한은행 미아동 지점	1	-	1
6	도봉로	롯데백화점 미아점	73	32	41
7	도봉로	숭인시장 입구	8	7	1
8	도봉로	이마트 미아점	1	-	1
9	동소문로	성신여대입구역 버스승강장	22	2	20
10	동소문로	성신여대입구역 1번출구 앞	47	-	47
11	동소문로	성북구청 입구교차로	21	19	2
12	동소문로	LG베스트샵 삼선교점	52	41	11
13	동소문로	한성대학교 버스정류장	78	56	22
14	동소문로	삼선교 맨도날드 앞	49	-	49
총 정비 물량			414	204	210

○ 시인성 불량물량 204경간 ⇒ 교체 작업 실시

- 철거 물량은 도색 및 반사지 부착 후 재사용(1경간당 12천원 소요 예상)

○ 파손 물량 210경간 ⇒ 조달구매 및 정비 시행

○ 소요예산 : 99,896,540원(조달수수료 포함)

- 예산과목 : 도로관리과, 도로시설물 관리 및 도로부속물 관리, 도로부속시설물 일상 유지관리, 시설비 및 부대비, 시설비

□ 정비일정

3.20.~4.30.		5.1.~5.18.		5.1~
무단횡단 금지시설 철거 및 재설치 (도봉로 일대)		철거 자재 도색 및 반사지 부착 작업 (사업소 제설창고 앞)		철거 자재 재사용 (파손발생 시 사용)

Ⅲ		기대 효과

○ 교통안전사고 예방 효과

- 시인성 개선 및 시설물 보강으로 교통안전사고 예방

○ 기존 시설물 재활용하여 예산절감

- 재활용 물량 204경간

- 경간당 절감액 228천원(1경간구매 금액 240천원 - 소요비용 12천원)

⇒ 204경간×(240천원-12천원)=46,512천원

붙 임 : 위치도 및 현장사진 1부.  끝.