투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
		서울대공원
수신	내부결재
(경유)
제목	민원회신(공사설계금액의 합리적산정으로 정당한금액지급)

************

서울대공원에서 시행한 해양관 외부방사장 등 시설개선공사와 관련하여 귀하께서 요청 하신 수용성에폭시 도장공사 설계금액이 불합리 하므로 합리적 공사비 산정 및 정당한 금액지급에 대하여 아래와 같이 답변 드립니다.

서울대공원 해양관 외부방사장 등 시설개선공사 계약단가는 발주기관이 교부한 물량내역서에 계약상대자(시공사)가 공사도면, 시방서 등을 검토하여 단가를 적어내 정당하게   계약이 성사된 사항으로 당초 계약시 이러한 문제점에 대한 시공사의 이의 제기도 없었습니다.

또한 수용성에폭시페인트 공사중 시공사는 당초 설계내역서상 규격을 맞출 수 없고 시공상 애로사항이 있다는 의견을 제기함에 따라 시공사와 합의하에 불가피하게 규격을 조정하여 실제 시공한 물량에 맞게 금액을 조정 지급하였던 것입니다

이러한 사유로 서울대공원에서도 귀하의 의견을 반영할 수 없었던 점은 매우 안타까운 일이었지만 합의 및 계약내용에 따라 부득이 감액을 할 수 밖에 없었던 점을 널리 이해해 주시기 바랍니다.

앞으로도 ****께서 하시는 일마다 무궁한 발전이 있기를 기원합니다.

감사합니다.

주무관							김용주			시설과장					03/20 오임석
협조자				주무관						배진수
시행			시설과-1510									(						)		접수											(						)
우	13829					경기도 과천시 대공원광장로 102															/			http://grandpark.seoul.go.kr
전화		02) 500-7411						/전송			02) 507-7230					/	kyjoo@seoul.go.kr												/	부분공개(6)