문서번호	설비부-3625
결재일자	2018.3.20.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

		시 민
주무관	환경설비과장	설비부장
김현욱	여인웅	03/20 권오식

『천호대로(광나루역)확장 전기공사』

물가변동에 따른 계약금액 조정(6회) 검토 보고

2018. 03.

도시기반시설본부

[설 비 부]

『천호대로(광나루역)확장 전기공사』

물가변동에 따른 계약금액 조정(6회) 검토 보고

「천호대로(광나루역)확장」전기공사의 물가변동(ESC)에 따른 계약금액 조정(6회)에 대해 아래와 같이 검토 결과를 보고합니다.

Ⅰ		관 련 근 거

천호수 제2018-096(2018.03.19.), 물가변동으로 인한 계약금액       조정 요청에 따른 검토 보고

Ⅱ		공사개요

공 사 명 :『천호대로(광나루역)확장 전기공사』

공사위치 : 서울시 광진구 구의동 58-15~광장동 388-10

공사기간 : 2011. 06. 16. ~ 2018. 06. 30.

공사내용 : 지하차도 조명등 및 가로등 설치공사 1식

도 급 비 : (총차) 1,361백만원, (7차) 643백만원

시 공 사 : ㈜거성전설 대표 공병준

감 리 사 : ㈜수성엔지니어링

Ⅲ		검토내용

계약금액(ESC) 조정 조건

구분 횟수	제 6 회	비 고 (충족조건)
조 정 방 법	지 수 조 정	적 합 (계약서 확인)
기 준 시 점	2016.12.31.	적 합 (90일 이상)
비 교 시 점	2017.09.01.
경 과 기 간	244일 경과
조 정 률	3.53%	적 합 (3% 이상)

계약금액(ESC) 조정(6회) 내용

물가변동 조정률 [A]	3.53%	물가변동 경과기간	244일	기준시점(직전조정일) : 2016.12.31.
				비교시점(조정기준일) : 2017.09.01.
물가변동 대상공사의 계약금액 [B]		1,348,044,000원		물가변동 조정기준일 현재의 공정률	예정공정률	59.62%
					실행공정률	59.62%
물가변동 적용제외 계약금액 [C]		938,425,138원		물가변동 적용대가 [D] = [B - C]	409,618,862원
선금급 공제금액 [F]		해당 없음		물가변동 등락대상 조정금액 [G] = [C × A]	14,459,000원
경유세 공제금액 [H]		해당 없음		물가변동 조정 적용금액 [I] = [G – F - H]	14,459,000원

계약금액(ESC) 조정(6회) 검토결과

구 분	공사(총차) 계약금액(원)	조정 방법	기준시점	조정율	조정금액(원)	결과
			비교시점
(1회)	1,135,004,519	지수 조정	2011.06.09	3.82%	40,087,000	2012년 승인완료
			2012.01.01
(2회)	1,175,091,519	지수 조정	2012.01.01	3.36%	28,485,000	2016년 승인완료
			2013.01.01
(3회)	1,203,576,519	지수 조정	2013.01.01	3.38%	29,371,000	2017년 승인완료
			2014.01.01
(4회)	1,321,569,000	지수 조정	2014.01.01	3.78%	35,367,000	2017년 승인완료
			2016.01.01
(5회)	1,356,936,000	지수 조정	2016.01.01	3.49%	24,227,000	2018년 승인완료
			2016.12.31
(6회)	1,348,044,000	지수 조정	2016.12.31	3.53%	14,459,000	적합(승인)
			2017.09.01

감리단 검토의견

□ 시공사인 ㈜거성전설로부터 제출된 물가변동으로 인한 계약금액조정        보고서에 대하여 계약금액을 조정함이 타당하다고 판단됨.

Ⅳ		조치의견

책임 건설사업관리기술자가 검토한 물가변동으로 인한 계약금액(ESC)
조정(6회) 건에 대하여 검토한 결과 적정한 것으로 판단되어 계약금액 조정(6회) 건을 승인하고 건설총괄부에 계약변경을 요청하고자 함.

붙임  검토 보고서(감리단) 1부.  끝.