문서번호	문화융합경제과-2865
결재일자	2018.3.20.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		영상산업팀장	문화융합경제과장
박혜란		박경민	03/20 최판규
협조
	설계공모운영팀장		이종윤

서울시네마테크(가칭) 건립

국제설계공모 관리용역 계약 변경 계획

2018. 3.

문화융합경제과

서울시네마테크(가칭) 건립

국제설계공모 관리용역 계약 변경 계획

서울시네마테크(가칭) 설계공모 관리용역 중 참여건축가 및 심사위원 선정 등에 시간이 소요되고, 참여건축가 인원 등이 변동됨에 따라 용역기간과 계약금액을 조정하는 계약 변경을 추진하고자 함.

용역 개요

○ 용 역 명 : 서울시네마테크 건립 국제설계 공모관리 용역

○ 용역업체 : 주식회사 커브어소시에이츠 **********

○ 계약금액 : ****************

○ 용역기간 : ********************

○ 과업내용

- 국제 설계공모 시행을 위한 기획, 홍보, 진행 심사 및 선정, 작품 전시 및 활용방안 마련 등 설계 공모 시행업무와 관련된 일체의 제반사항

- 공모를 위한 설계지침서 작성 및 자료제공 일체 준비

용역 경위

○ ‘17. 8. 25. : 용역 계약

○ ‘17. 8 ~ 11월 : 설계공모 전문위원회 운영(5회)

- 지명건축가 및 심사위원 선정, 설계공모지침서 등 검토

○ ‘17. 9. 29. : 서울시네마테크 국제설계공모 시행계획 수립(도시공간개선단)

○ ‘17. 12. 1. : 서울시네마테크 국제지명 설계공모 공고

○ ‘18. 2. 27. : 당선작 선정 심사위원회 개최

○ ‘18. 2. 28. : 최종 당선작 발표

변경 내용

○ 용역기간 및 계약금액 변경

구분	변경 전	변경 후	증 감
용역 기간	********************	********************	******
용역 금액	************	************	************

※ 계약금액 변경 세부내역

(단위 : 원)

구분	변경 전	변경 후	증 감	비고
인건비	**********	**********	*
경 비	**********	**********	*********	***********************
순원가	**********	**********	*********	******
일반관리비	*********	*********	*******	*******
총원가	**********	**********	*********	*********
부가가치세	*********	*********	*******	********
참가보상비	***********	***********	***********	*******
총용역비	************	*************	***********	********** *****

* 323원 절삭, ** 5원 절삭

변경 사유

○ (용역기간 연장) 지명건축가·심사위원 선정 등에 시간이 소요됨에 따라 공모 일정이 지연되어 공모작품 전시회, 종합보고서 작성 등 과업내용을 완료하기 위해서는 용역기간 연장 필요

○ (계약금액 감액) 현장설명회 절차 추가, 심사위원회 준비사항 증가 등 추가비용이 발생하였으나, 지명건축가 인원 감소*로 참가보상비 등이 크게 감소하여 총 계약금액 감액 필요
* 지명건축가 중 1명 참여 포기로 당초 6명에서 5명으로 감소

향후 일정

**************************************

**********************************

*************************

*******************

붙임 : 1. 당초 산출내역서 1부.

2. 변경 산출내역서 1부.

3. 합의각서 1부.  끝.