문서번호	방재시설부-3564
결재일자	2018.3.21.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
★주무관		조경시설과장	방재시설부장
임성은		신용우	03/21 이임섭
협조
	도시고속도로과장		명경출

『강남순환도시고속도로 8공구건설공사』

조경공종 실정보고사항 검토보고

2018. 3

도시기반시설본부

[방재시설부]

『강남순환도시고속도로 8공구건설공사』

조경공종 실정보고사항 검토보고

『강남순환도시고속도로 8공구 건설공사』구룡지하차도 수서방향 가로수 식재 공사에 따른 변경사항을 검토보고 드림.

- 관련근거 : 동기강 2018-086(2018.3.20.)호

공사개요

□ 공 사 명 : 강남순환도시고속도로건설공사(8공구)

□ 공사위치 : 서초구 우면동~과천시 주암동~강남구 수서IC

□ 공사규모

- 본선 : 교량(2개소)540m, 지하차도(4개소) 2,790m, 토공구간 4,630m

- 조경사항

․ 제거 : 교목 235주     관목 29,324주

․ 이식 : 교목 1,504주   관목 20주

․ 식재 : 교목 162주     관목 56,878주

□ 공사기간 : 2002.7.3.~2018.7.31

□ 공 사 비 : 2,200억원(조경44억원)

□ 시 공 사/감리사 : 롯데건설(주)/동명기술공단

건설사업관리기술자 검토내용

□ 검토목적

•강남순환도시고속도로 8공구 건설공사 구룡지하차도 수서방향 최종보도  착공을 위한 가로수 식재공사 시행시 당초 기존 가이식 수목(은행나무(B16∼B26) 111주)을 재반입 식재토록 설계반영되었으나 가이식 수목 현장조사 결과 가로수 로서 효용성 부재로 유관기관(서울시 도로시설과)과 협의결과 신규식재(느티나무(R18)로 반영하고 그 적정성을 검토코자 함.

□ 관련근거

• 롯건강8 제2018-082(2018.3.16.)호

□ 추진경위

∙ 2017.06.09. : 지장수목 수요자 조회요청(건설사업관리단→발주처)

∙ 2017.06.22. : 수목사용처 조회결과 알림(발주처→건설사업관리단) : 수요처 없음

∙ 2017.11.01. : 발주처, 건설사업관리단, 시공사 합동 가이식장 수목 현황 조사

∙ 2017.11.23. : 강남순환도시고속도로 가로수 식재 협의에 따른 회신(서울시→발주처)

□ 검토내용

• 변경 사유

- 기존수목(가이식장) 은행나무 수형불량 및 맞은편 가로수(느티나무)와 통일성 감안하여 느티나무 신규식재(R18) 반영

- 가로수 수목보호판 서울시 우수공공디자인 제품으로 반영

• 가로수 식재 구간 위치 평면도

• 가로수 현황 사진

가이식장 은행나무	과천방향 기존 느티나무 전경

•주요변경 현황

공 종		규 격	단위	수 량		증․감	비 고
				당 초	변 경
굴취및식재(이식)	은행나무	*******	*	***	*	****
식재공사(신규)	느티나무	*********	*	*	***	***

•공사비 증감 현황

구 분	금 액(천원)			비고
	**	***	*********
6. 조경공	******	*******	******
직접공사비 계	******	*******	******
제 경 비	******	******	*****
도 급 액	******	*******	******

□ 적용단가 검토

∙ 신규비목 : 공사계약일반조건 제20조「설계변경으로 인한 계약금액의 조정」에 의거 현시점 산출단가에 강제협의율

[(최초낙찰율(59.714)+ 100%/2)=79.855%]적용

건설사업관리기술자 검토의견

**********************************************************************************************************************************************

*****************************************************************************************************

*********************************************************

검토결과

***************************************************************************************

****************************************************************************************

붙임 : 동기강 2018-086(2018.3.20.)호문서1부.  끝.