문서번호	교량안전과-4829
결재일자	2018.3.21.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		특수교량팀장	교량안전과장
임승민		정준용	03/21 한유석
협 조

한강상 PSC교량 안전강화공사(올림픽대교) 발주 계획

2017. 3.

안전총괄본부

〔교량안전과〕

한강상 PSC교량 안전강화공사(올림픽대교) 발주 계획

2015년 정밀안전진단 및 2017년 안전점검 결과 발견된 시설물 손상에 대하여 내구성 증진 및 안전확보를 위해 추진하는「한강상 PSC

교량 안전강화공사(올림픽대교)」의 발주 계획을 수립하여 보고 드림

Ⅰ		시설물 현황

시설물명 : 올림픽대교(접속교, 램프)

위    치 : 광진구 구의동 ~ 송파구 풍납동

시 공 자		유원건설	설 계 자		삼우기술단
준공년도		1990년	교량등급		1등급(DB-24)
올림픽대 교	본 교	․ 총연장 L＝1,470m ․ 교폭 : 30m(6차선) - 사장교(FCM) L＝300m, - PSC박스거더교(MSS) L＝650m, - PSC박스거더교(FSM) L＝520m
	접속교	․ 연장 L＝240m ․ 교폭 : 30m(6차선) - PSC 박스거더교 L＝140m, - 프리플렉스빔교 L＝100m
	램 프	․ 연장 L＝815m - B램프 L＝120m C램프 L＝120m E램프 L＝120m H램프 L＝280m I램프 L＝175m(2차선)
구조형식		․ 사장교 ․ PSC 박스거더교 ․ 프리플렉스 빔교	교량받침	․ 포트받침, 탄성받침 납면진받침, 전단키
기초형식		․ 교대 : 강관파일 ․ 교각 : 우물통,RCD파일,강관파일	신축이음	․ 강핑거형

시설개요

Ⅱ		공 사 개 요

공 사 명 : 한강상 PSC교량 안전강화공사(올림픽대교)

사업근거 : 2015년 정밀안전진단 및 2017년 정밀점검

공사기간 : ´18. 4 ~ ´18. 9

사 업 비 : 1,796백만원

규    모 : 아스콘 포장 72.35a, 교면 방수 7,235㎡

보도 정비 22a, 보차도경계블럭 재설치 550m 등

Ⅲ		주요 공사내용

아스팔트 포장(72.35a), 교면 방수(7,235㎡)

○ 상류교 본교 북측 광진방향 (P3~P9), (P10~P15) 포장 균열 및

포트홀 등 노후 정비〈 PSC 교량 텐던 정착구, 에어밴트 이상유무 확인 병행 〉

보도 정비(2,205㎡), 보차도경계블럭 재설치(550m) 등

○ 보도부 콘크리트 열화, 보차도경계블럭 노후 및 기초부 열화부 정비

【 대 상 구 간 】

Ⅳ		발 주 계 획

공사입찰 방법

○ 입찰방식 : 일반경쟁입찰

○ 입찰참가자격

***************************************

- *************************************      ***************************************       *************************************

**************************

*********************************************      *****

※***************************************      ************************************      ****************************************      *****************************************      *********************

분 야	신기술(특허)명	신기술(특허)번호	신기술(특허)보유자
****	**********************	** ***********	********
****	*******************************************************************	** ***********	********

관급자재 및 이전비(폐기물) 등

○ 교면 포장 공사에 사용되는 아스콘은 교량관리팀에서 발주 중인 “한강교량

일상유지보수공사-1공구 외 4개소” 와 통합하여 구매 시행

○ 발생 건설페기물에 대하여는  특수교량팀에서 발주 중인 “ 동호대교 외 2개소    보수공사 건설폐기물 처리 용역 ”으로 운반 및 처리하고 이전비에서 정산

공 종	규 격	단위	물 량	개략공사비	비 고
********				*********
**********	***	*	*****	**********
*********	**	*	*****	********
*********	**	*	******	*******
***********	**	*	***	**********
******		*	*	******
****		*	*	*********
*****		*	*	*********
****	*****	*	*****	**********
*****	*****	*	*	*********

※ 공종별 개략 공사비                                      (단위 : 천원)

Ⅴ		향 후 계 획

´18.  3 : 계약심사 요청

´18.  4 : 공사 발주, 계약 및 착공

´18. 10 : 공사 준공.  끝.