투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시도시기반시설본부
수신	건설총괄부장
(경유)
제목	건설사업 관리용역(설계감리) 준공기한 연기 요청

1. 토목부-4736호(2018. 3. 21.)와 관련입니다.

2. 우리본부에서 시행중인『월드컵대교 남단 연결로 및 접속교 보완설계 건설사업관리(설계감리)용역』에 대하여 아래와 같이 준공기한 연기 의뢰하오니 조치하여 주시기 바랍니다.

가. 용역개요

1) 용 역 명 : 월드컵대교 남단 연결로 및 접속교 보완설계 건설사업관리(설계감리)용역

2) 용 역 비 : 125,235,000원

3) 용역기간 : 2017. 8. 11.~2018. 3. 23.

4) 계 약 자 : ㈜제일엔지니어링

나. 준공기한 연기 : 191일 연장

- 당초) 2018. 3. 23. → 변경) 2018. 9. 30.

다.  귀책소재, 지체상금 및 연기사유

1) 귀책소재 : 서울특별시

2) 지체상금 : 미부과

3) 연기사유 : 월드컵대교 남단 연결로 및 접속교 보완설계에서 자문회의 결과 반영, 관련기관 협의 및 행정절차 이행 등 설계가 진행 중이며 서부간선 지하도로 민자 사업 구간과 연결부 추가과업에 따른 설계 감리에 소요되는 용역기간(191일)을 반영하여 준공기한 연기

라. 예산과목 : 도로건설, 간선도로망 확충(도시개발특별회계), 월드컵대교건설, 시설비

붙임 : 1) 준공기한 연기 방침 1부.

2) 붙임2. 준공기한 연기 의뢰서(월드컵대교남단 설계감리) 1부.

3) 준공기한 연기요청 공문 사본 1부.

4) 합의각서 1부.  끝.

	토목부장
주무관	김동수		토목설계과장	안규홍		토목부장	03/21 김영수
협조자
시행	토목부-4754	(		)	접수		(		)
우	04520	서울특별시 중구 청계천로 8 (무교동) 프리미어플레이스빌딩 12층	/	http://infra.seoul.go.kr
전화	02-3708-2587	/전송	02-3708-2599	/		/	부분공개(5)