문서번호	방재시설부-3567
결재일자	2018.3.21.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
★주무관		조경시설과장	방재시설부장
송석범		신용우	03/21 이임섭
협조	의료시설과장		이형재
	주무관		문성재

- 시립중랑노인전문요양원 증축공사 -

공사부지내 지장수목 이식에 대한 실정보고 검토보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

도시기반시설본부

(방재시설부)

- 시립중랑노인전문요양원 증축공사 -

공사부지내 지장수목 이식에 대한 실정보고 검토보고

“시립중랑노인전문요양원 증축공사”와 관련하여 공사부지내 지장수목 발생으로 관련기관인 중랑구청과 업무 협의한 결과를 공사에 반영한 실정보고 검토임.

※ 관련근거 : “실정보고 기술검토서 제출”/ PC18(시립요양원)-023(2018.03.12.)

Ⅰ		공사개요

□ 공 사 명 : 시립중랑노인전문요양원 증축공사

□ 사업기간 : 2017.12.20. ~ 2019.06.19.

□ 위    치 : 서울특별시 중랑구 양원역로 38

□ 규    모 : 지하1층, 지상5층, 증축 2,280.35㎡

□ 공 사 비 : 2,350백만원(조경 112백만원)

□ 시 공 사 : 용성종합건설㈜

□ 감 리 사 : ㈜펨코엔지니어링건축사사무소

Ⅱ		감리단 실정내용 및 검토의견

□ 실정보고 내용

구분	단위	당초	변경	증·감	비고
수목이식(R15)	주	-	2주	증2주

□ 검토의견

○ 금번 지장수목 이식건 실정보고사항은 당초 설계도면에 있으나          내역에 반영되지 않은 사항임.

○ 공공자산인 지장수목 가로수(이팝나무) 2주는 대지경계선 내부에          위치하여 원인자인 발주청의 비용부담으로 처리 또는 이식해야 할          사항임.

Ⅲ		개략공사비 내역

(단위 : 천원)

구 분	단위	당 초	변 경	증․감	비 고
직접공사비	1식	81,473	81,936	증462
제 경 비	1식	20,461	20,652	증191
공급가액	1식	101,934	102,588	증653
부가가치세	1식	10,193	10,258	증65
도급공사비	1식	112,127	112,846	증719
총공사비	1식	112,127	112,846	증719

Ⅳ		검토결과

□ 공사부지내 H-PILE 작업 및 오수관 신설시 간섭되는 이팝나무 2주에        대하여 수목 이식이 필요 함.

□ 관련기관인 중랑구청(공원녹지과)과 이식 협의하여 지정장소에 이식        하고자 함.

※ 관련문서 : 지장수목 이식 협의 회신(중랑구 공원녹지과-3247/2018.2.27.)

□ 우선 시공토록 실정보고 사항을 승인처리 하며 추후 설계변경에        정산․반영할 수 있도록 책임건설사업관리기술자에게 통보하고자 함.

붙임 : 감리단 실정보고 공문 1부.  끝.