문서번호	시설관리과-5161
결재일자	2018.3.22.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

				시 민
주무관	시설관리과장	강남수도사업소장
김진성	박은선	03/22 최규해
협 조
	행정지원과장		김인웅
	급수운영과장		박희철
	주무관		윤복철
	주무관		정연준

“명품 아리수, 명품 강남수도”
『신속한 복구 및 안전사고 예방을 위한』 2018년 서초.강남구 관내 긴급 누수복구공사 추진계획

2018. 03

강남수도사업소

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	■
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
성인지	● 성별분리통계 작성여부를 검토하였습니까? 예) 인적통계 남·여 구분, 수혜집단의 남·여 구분 등	□	■
일자리	● 일자리 창출 효과 및 일자리 수를 검토하였습니까? 예) 직·간접 채용, 취업알선, 전문인력양성, 창업지원 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	□	■
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	■
홍 보	● 사업 홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
정 책 영문화	● 정책 영문화 및 해외홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 영문 제목‧요약, 해외 언론 보도, 외국어 홈페이지 등	□	■
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	□	■
결재문서공개	● 공개 여부를 “비공개”로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? 예) 정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호	■	□

『신속한 복구 및 안전사고 예방을 위한』

2018년 서초.강남구 관내 긴급 누수복구공사 추진계획

2018년도 상수도 누수복구의 원활한 시행을 위한 누수복구 발주계획을 수립하여 돌발적으로 발생하는 누수사고에 신속하고 선제적 대응및 재해 예방과 유수율 증대에 만전을 기하고자 함.

공사 개요

○ 관련근거

- 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 제24,25조(단가계약)

○ 공 사 명: 2018년 서초.강남구 관내 긴급누수복구공사(장기계속단가계약)

○ 규  모

- 긴급누수복구공사 : D=13~900nn, N=1,200개소

- 인입관 및 불용관정비공사 : D=13mm~500mm, N=500개소

○ 공사기간: ‘2018년 착공일로부터 2019.6.30까지

○ 예산과목:

- 상수도사업비용,영업비용,배급수비,수선유지교체비(상수도관 누수복구)

- 상수도사업비용,영업비용,배급수비,수선유지교체비(불용관 정비)

○ 발주 현황

- 총공사비: 2,228,874천원

- 도 급 비: 2,074,050천원

- 관 급 비:  154,824천원

계약심사 결과

○ 관련근거: 설계심사 결과통보【계약심사과-5168호(2018.03.20.)】

○ 주요심사내용 및 사유

- 자재단가 및 일위대가 조정

◾ 동력분무기 시간당 재료비(휘발유 7.5→1.3L/hr) 조정(품셈 9-3)

◾ 아스팔트 포장 절단품(작업량 500m/일) 조정(품셈 10-4-2, 9)

◾ 잔토 소운반(인력상차, 2.5DT) 품 산출 오류 수정

◾ 강관 절단품(아세틸렌→LPG) 조정(품셈설비 3편 1장 1-2-1) 등

예산집행 현황

○ 2017년 예산집행(긴급누수복구공사)

계약금액	기성(정산) 지급한 금액	남은 금액	1~4월중 기성 예상금액	비 고
1,595,793	1,245,552	350,241	350,241	4월 전액 소진

단 위 : 천원

○ 2018년 긴급누수복구공사 계약심사결과

단 위 : 천원

사업명	예산액	심사요청	심사금액	감액	비고
2018년 서초.강남구 관내 긴급 누수복구 공사	2,274,050	2,085,699	2,074,050	11,649

추진방법

○ 입찰 및 계약

- 입찰은 총 예정수량을 기준으로 표시

- 계약잔고 소진에 따른 긴급공고 실시

※ 총소요기간(22일):긴급공고(5일)+적격심사(7일)+계약 및 착공일(10일)

- 2017년(1차연도) 계약체결은 당해연도에 이행할 금액과 총부기 금액을 계약서에 명기하여 계약을 체결하고,

- 2018년도(2차연도)분은 부기한 총금액에서 1차연도 계약분을 제외한 나머지 금액에 대하여 계약체결,

( ※지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 제24조 )

○ 계약기간(총 부기기간) : 착공일로부터 2019.6.30까지

- 1차연도 : 착공일~2018.12.31

- 2차연도 : 2019.01.01.~2019.06.30

추진계획

○ 2017년 서초.강남 긴급누수복구공사(연간단가) 준공 : 2018.6월

○ 2018년도 계약심사과 긴급누수복구공사 설계심사 의뢰 : 2018.3.13.

○ 계약심사과 긴급누수복구공사 설계심사 결과 통보 : 2018.3.20.

○ 2018년도 긴급누수보구공사 설계 일상 감사의뢰 : 2018.3.21.

○ 2018년도 긴급누수보구공사 발주 : 2018.3.28.

○ 2018년 입찰공고(5일) : 2018.3월말.

○ 2017년 긴급누수보구공 계약 및 착공 : 2017.4월

행정사항

○ 긴급입찰 공고 시행 :  재무과

붙  임 : 1. 관련공문(설계심사 결과검토서) 1부

2. 설계내역서(조정) 1부.

3. 긴급공고 사유서 1부.  끝.