문서번호	공간정보과-2143
결재일자	2018.3.22.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
★주무관		공간정보과장	시설안전부장
박현대		채재일	03/22 代유승효
협조	주무관		홍석현
	주무관		김영혁

2017년 상수도 GIS DB 정확도 개선사업

공공측량성과심사(3차-최종) 결과보고

2018. 3.

상수도사업본부

(공간정보과)

2017년 상수도 GIS DB 정확도 개선사업

공공측량성과심사(3차-최종) 결과보고

『2017년 상수도 GIS DB 정확도 개선사업』의 공공측량성과심사(3차-최종) 결과를 보고 드림.

Ⅰ		개 요

추진근거

❍ 공간정보의 구축 및 관리 등에 관한 법률 제18조 및 동법 시행규칙 제22조

추진목적

❍ 공신력있는 심사기관의 공공측량성과심사를 통해 정확도 점검 및 품질 확보

대상사업 : 2017년 상수도 GIS DB 정확도 개선사업

심사대상 : 도시기준점, 탐사·탐사/측량 및 편집이 완료된 성과

(상수도시설물 44.379㎞)

심사기간 : 2018. 3. 14.~3. 21

심사방법 : 실내 및 현지심사(대상 무작위 표본추출)

심사항목 : 일반사항, 조사·탐사/측량, 정위치 편집, 구조화 편집

심사기관 : 공간정보산업협회

결과요약

❍ 대상 434.0㎞ 중 44.379㎞ 성과심사 완료

❍ 심사결과

평가항목	조사·탐사/측량	정위치 편집	구조화 편집
판 정	“적합”	“적합”	“적합”

Ⅱ		심사현황

대상사업 : 2017년 상수도 GIS DB 정확도 개선사업

❍ 사업개요(DB구축 434㎞, *******원)

구 분	서북지역	서남지역	동남지역
용역내용	측량 및 편집 : 162㎞ (신설 44, 기존 118)	측량 및 편집 : 121㎞ (신설 29, 기존 92)	측량 및 편집 : 151㎞ (신설 51, 기존 100)
용역기간	2017. 2. 23.~2018. 3. 31.
계약금액	*******원	*****원	*******원
수 행 사	*********	***********	*********
해당사업소	중부, 서부, 북부	강서, 남부	동부, 강남, 강동

성과심사현황

❍ 성과심사 대상

구 분		합 계	서북지역	서남지역	동남지역
도시기준점		0점	0점	0점	0점
지하시설물도		220도엽	75도엽	50도엽	95도엽
연장	총연장	44.379㎞	15.497㎞	11.351㎞	17.531㎞
	탐 사	3.038㎞	0.480㎞	0.300㎞	2.258㎞
	실 측	40.839㎞	15.017㎞	10.689㎞	15.133㎞
	불 탐	0.502㎞	0㎞	0.362㎞	0.140㎞

❍ 사업물량 대비 성과심사율

구 분		계	서북지역	서남지역	동남지역
심사율		103.2%	100.8%	105.6%	104.0%
사업물량		434.000㎞	162.000㎞	121.000㎞	151.000㎞
심사물량	계	448.097㎞	163.216㎞	127.794㎞	157.087㎞
	전회	403.718㎞	147.719㎞	116.443㎞	139.556㎞
	금회	44.379㎞	15.497㎞	11.351㎞	17.531㎞

❍ 심사항목(기준) 및 방법 : 공공측량성과심사 규정에 의함.

[붙임1] 공공측량성과심사 기준 및 방법 요약 참조

Ⅲ		심사결과

조사/탐사 및 측량(현장) : 표본(2%)검사

구 분		대상(점)	기준내(점)	적합도(%)	비 고
총 계	평면	42	42	100.0	적 합
	심도		42	100.0	적 합
서 북	평면	10	10	100.0	적 합
	심도		10	100.0	적 합
서 남	평면	6	6	100.0	적 합
	심도		6	100.0	적 합
동 남	평면	26	26	100.0	적 합
	심도		26	100.0	적 합

조사/탐사 및 측량(실내) : 표본(20%)검사

구 분		대상(점)	기준내(점)	적합도(%)	비 고
총 계	평면	1,671	1,615	96.6	적 합
	심도		1,647	98.6	적 합
서 북	평면	662	635	95.9	적 합
	심도		646	97.6	적 합
서 남	평면	428	425	99.3	적 합
	심도		428	100.0	적 합
동 남	평면	581	555	95.5	적 합
	심도		573	98.6	적 합

정위치 편집 : 표본(20%)검사

구 분	대상(점)	기준내(점)	적합도(%)	비 고
총 계	1,212	1,206	99.5	적 합
서 북	481	477	99.2	적 합
서 남	328	328	100.0	적 합
동 남	403	401	99.5	적 합

구조화 편집 : 표본(20%)검사

구 분	대상(점)	기준내(점)	적합도(%)	비 고
총 계	1,212	1,197	98.8	적 합
서 북	481	471	97.9	적 합
서 남	328	325	99.1	적 합
동 남	403	401	99.5	적 합

결과분석

❍ 조사/탐사·측량(현장) : 적합도 평면 및 심도 100.0%로 심사기준(80%) “적합”

❍ 조사/탐사·측량(실내) : 적합도 평면 96.6%, 심도 98.6%로 심사기준(80%) “적합”

❍ 정위치 편집 : 적합도 99.5%로 심사기준(90%) “적합”

❍ 구조화 편집 : 적합도 98.8%로 심사기준(90%) “적합”

Ⅳ		향후계획

부적합 성과 재확인 및 보완지시 : 2018. 3. 27.까지

심사완료물량 기성시행(검사)  : 2018. 3. 30.까지

심사 및 보완완료된 DB, 사업소담당 확인 후 GIS에 신속 탑재

붙 임 : 1. 공공측량성과심사 기준 및 방법요약 1부.

2. 공공측량성과심사 결과서 각 1부.  끝.