문서번호	물재생시설과-4063
결재일자	2018.3.22.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

				시 민
실무사무관	오폐수관리팀장	물재생시설과장		물순환안전국장
이해원	김윤수	이인근		03/22 한제현
협 조
	물재생시설팀장		이웅희
	물재생기전팀장		황철호
	위탁관리팀장		이문주
	주무관		김태환

서남물재생센터 분뇨처리시설

현대화사업 인수인계 계획보고

2018. 3.

물순환안전국

(물재생시설과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	■
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
성별분리통계	● 성별분리통계 작성여부를 검토하였습니까? 예) 인적통계 남·여 구분, 수혜집단의 남·여 구분 등	□	■
일자리	● 일자리 창출 효과 및 일자리 수를 검토하였습니까? 예) 직·간접 채용, 취업알선, 전문인력양성, 창업지원 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	□	■
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	■
홍 보	● 사업 홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
정 책 영문화	● 정책 영문화 및 해외홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 영문 제목‧요약, 해외 언론 보도, 외국어 홈페이지 등	□	□
바른 우리말	● 불필요한 외국어·외래어 표현 대신 바른 우리말을 사용하였습니까? 예) 스페이스, 플랜, 앵커시설, 거버넌스, 인큐베이팅, 매칭 등	■	□
결재문서공개	● 공개 여부를 “비공개”로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? 예) 정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호	□	■
지속 가능성	● 정책·계획 등의 지속가능성을 검토하였습니까? 예) 지역경제 발전, 사회적 형평성, 환경의 보전 등	□	■

서남물재생센터 분뇨처리시설

시설물 인수·인계 계획보고

『서남분뇨처리시설 증설 및 현대화사업』에 의거 시행된 서남물재생센터 분뇨처리시설의 설치완료에 따른 시설물 인계 · 인수계획 보고임.

1		사업개요

○ 사 업 명 : 서남분뇨처리시설 증설 및 현대화 사업

○ 시설용량 : 분뇨처리시설 4,000톤/일

○ 사업기간 : 2011. 11. 15 ~ 2016. 10. 25

○ 시 공 사 : ㈜대림산업 외 2개사 컨소시엄

○ 설치시설 : 분뇨처리시설

2		추진현황

○ 2009.09.14. 기본계획용역 완료

○ 2011.06.29 서남분뇨처리시설 현대화 추진계획 수립

○  2011.09.16 : 입찰공고(설계시공 일괄입찰)

○  2012.02.29 : 기본설계 적격심의 (실시설계 적격자 선정)

○  2012.07.29 : 실시설계 적격심의(낙찰자 선정)

○  2012.11.15 : 공사 계약 및 착공

○  2013.04.30 : 1차공사 준공

○  2015.03.31 : 2차공사 준공

○  2015.07.18 : 3차공사 준공

-1차시운전 2016.01.11.~3.14

-2차시운전 2016.07.25.~9.24

○  2016.10.25  : 공사준공(4,5차공사 준공)

○ 2016.11.15 : 시설물 인수인계 요청(도시기반시설본부)

○ 2017.2.14.~2.16 : 합동점검(도기본·물재생시설과·대림산업·감리단·서남센터)

○ 2017.12.04 : 개선사항 조치완료

- 조대협잡물처리기 1대(2대→3대), 이송컨베어 공기압축기 1대((3대→4대) 증설 등

○ 2018.02.22 : 시설물목록확인(도기본·물재생시설과·대림산업·서남센터)

○ 2018.03.16 : 시설물 인수인계 목록 확인 보고(서남환경)

3		분뇨처리시설 인수인계 대상목록 (세부내역 별첨1)

○ 토목구조물 : 전처리실, 농축기실, 부상분리설비실, 슬러지저류조, 상등수저류조, 탈리액저류조, 협잡물호퍼실, 차량대기실 등

○ 조경시설물 : 소나무, 느티나무, 측백나무, 배롱나무 등

○ 건 축 시 설 : 관리시설, 분뇨처리시설, 화장실, 계단실 등

○ 기계시설물 : 폐기물처리기, 협잡물종합처리기, 협잡물 및 침사물 컨베이어, 농축설비, 부상분리설비, 탈취설비, 각종 폄프류 및 밸브류 등

○ 전기시설물 : 수배전반, 감시제어설비, 계측기기 등

4		합동점검 계획

○ 점검대상 : 서남분뇨처리시설공사 설치완료 시설물

- 고도처리시설 시운전 및 운영상 ㈜서남환경에서 지적 및 보완요청한 사항에 대하여 조치완료 여부 등을 확인

○ 점검일자 : '18. 4. 5(목) 14:00~

○ 참석대상자

- 물재생시설과 : 오폐수관리팀장, 분야별 업무담당자(6명)

- 도시기반시설본부 : 설비부 서남 분뇨처리시설 관계자

- ㈜서남환경 분뇨처리시설 분야별 담당(6명)

- 시공사 및 감리단 관계자

○ 실무 분야별 인수 검토 및 확인자

- 물재생시설과

구 분	업 무 담 당 자		담 당 팀 장
	직 급	성 명	직 명	성 명
토목, 건축, 조경	시설주사(토목)	양해선	물재생시설팀장	이웅희
기계, 전기	공업사무관(기계)	조귀현	물재생기전팀장	황철호
	공업서기(전기)	이은석	위탁관리팀장	이문주
수질, 악취	실무사무관(화공) 공업주사(화공)	이해원 김태환	오폐수처리팀장	김윤수

- ㈜서남환경

구 분	담 당 부 장		담 당 실 장
	직 명	성 명	직 명	성 명
토목, 건축, 조경	시설부장	최영규	경영관리실장	유영종
기계, 전기	환경관리부장	박용호	운영2실장	윤선헌
수질, 악취	기술연구부장	백만성	기술연구소장	최원용

5		행정사항 및 향후계획

○ 운영부서(서남환경) 지적/보완 요구사항에 대한 조치 여부 확인을 위한 합동점검 후 조치완료 시설물 인수 · 인계 추진

붙 임 : 서남 분뇨처리시설 인수 · 인계 대상내역 1부. 끝.