문서번호	정수시설과-2540
결재일자	2018.3.22.
공개여부	대시민공개
방침번호

				시 민
주무관	정수시설과장	영등포아리수정수센터소장
김기홍	유영춘	03/22 이성락
협 조

‘17년 기계설비 유지보수공사(총차,2차) 설계변경(정산) 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2018.3.

영등포아리수정수센터

(정수시설과)

우리 정수센터 ‘17년 기계설비 유지보수공사(2차) 시행중 설계변경 사항이 발생하여 변경시행코자 보고합니다.

‘17년 기계설비 유지보수공사(총차,2차) 설계변경(정산) 보고

1. 공사개요

○ 공 사 명 : 기계설비 유지보수공사(장기계속공사)

○ 도 급 자 : 삼정수도 대표 정진욱

○ 계약금액 : 총차 235,462,370원(1차 215,919,000원, 2차 19,543,370원)

○ 공사기간 : ‘17. 05. 02. ~ ’18. 03. 31.

- 1 차 수  : ‘17. 05. 02. ~ ‘17. 12. 31.(준공)

- 2 차 수  : ‘18. 01. 01. ~ ‘18. 03. 31.

○ 변경내용 : 붙임 “설계변경내역서” 참조

○ 관련근거

- 지방자치단체 공사계약일반조건 제4장(행정안전부예규 제253호)

- 지방자치단체 입찰 및 계약 집행기준 제1장8절,13장6절(행정부안전부예규 제34호)

2. 설계변경 사항

○ 신규공종 발생 및 시공물량 증․감

○ 안전관리비 삭감 : 4천만원 미만 미대상

○ 건강, 연금보험료, 노인장기요양보험료 삭감 : 시공사 미납

○ 공사비 증감내역                                        (단위:원)

구 분	당 초	변 경	증,감	비 고
총 차	235,462,370	235,462,370	-	증감없음
1 차	215,919,000	215,919,000	-	’17.12.27. 준공
2 차	19,543,370	19,543,370	-	증감없음

3. 조치계획

○ 건설공사 설계변경 심의위원회 개최 후 결과를 반영하여 변경계약 및 준공처리코자 함

붙임 : 설계변경내역서 1부.  끝.