문서번호	시설과-575
결재일자	2018.3.22.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		공원조성팀장	시설과장
최종성		송복식	03/22 진병규
협조
	주무관		김재희

『보라매공원 산사태 예방사업』

자체 설계심사 결과보고

2018. 3.

동부공원녹지사업소

(시설과)

『보라매공원 산사태 예방사업』

자체 설계심사 결과보고

「보라매공원 산사태 예방사업」관련 자체 설계심사를 실시하고 결과를 보고드림.(조경지원과-635호(2018.3.16.)

※ 검토근거 : 2018년 자체 설계심사 운영계획(시설과-132호, ‘18. 1. 23)

□ 검토 개요

○ 건    명 : 보라매공원 산사태 예방사업

○ 공 사 비 : 금100,000천원(도급비:94,728천원, 관급비:5,272천원)

○ 검토일시 : 2018. 3. 21(수) 14:00

○ 검 토 자 : 시설과 3명(녹지6급 송복식, 녹지7급 김재희, 임기8급 최종성)

□ 검토 항목

○ 원가계산서, 내역서, 수량산출, 도면 등 적정성 검토

□ 검토 결과

○ 공사비 조정

구분	당초	변경	증감	비고
총공사비	100,000천원	80,858천원	-19,142천원
도급비	94,727천원	72,117천원	-22,610천원	(감)
관급비	5,272천원	8,740천원	3,468천원	(증)

○ 공사 내역서

- pe배수로 철거품은 pe관 부설품을 준용하여 설치비 30%로 적용(적용품 과다)

- 능형망 철거품은 보통인부, 특별인부 제거(적용품 과다)

- 메쉬휀스 설치는 관급자설치로 변경(적용품 과다)

- 벤치플륨관 설치품은 소운반삭제 및 기구손료 4%→2%로 변경(동작구일위대가 적용)

○ 도면

- 철거 수량 도면, 수량산출서, 내역서 일치 수정

- 싸리나무 이식  도면, 내역서 수량 일치 수정

□ 조치 의견

○ 상기 검토결과에 따른 설계도서 재작성 및 추가 사항이 있을 경우

추가 반영하여 공사시행

검토자   소속   동부공원녹지사업소   시설과   직   녹지 6급   성명  송복식 (인)

검토자   소속   동부공원녹지사업소   시설과   직   녹지 7급   성명  김재희 (인)

검토자   소속   동부공원녹지사업소   시설과   직   임기 8급   성명  최종성 (인)

붙임 : 공사내역서(심사전, 심사후) 각1부. 끝.