“변화를 선도하는 강남, 희망을 선사하는 강남”

등록번호	도로관리과-5468		주무관	도로관리팀장		도로관리과장		안전교통국장		부구청장
			이현호	김종철		김근태		박은섭		03/22 주윤중
등록일자	2018.3.22.
결재일자	2018.3.22.
공개구분	부분공개(5)
			협조자		행정국장		박철수
					재무과장		이명옥
					계약팀장		박성희

- 2017/2018년 區, 洞 제설대책 민간위탁 용역(장기계속) -

설계변경(정산) 시행 계획

▢ 2017/2018년 제설대책 비상근무 현황

구 분	강설현황		비 상 근 무 현 황					비 고
	횟수	적설량	계	보강	1단계	2단계	3단계
2017/2018	13회	26.4cm	26회	15회	10회	1회	-
2016/2017	8회	17.9cm	19회	12회	6회	1회	-	참고

▢ 설계변경사유

○ 제설대책 비상근무 발령에 따른 실 작업 및 대기 시간 반영

▢ 용역비 증ㆍ감 사항

구분	區 용역			洞 용역
	당초	변경	증ㆍ감	당초	변경	증ㆍ감
총차	356,790,700	437,660,000	증) 80,869,300	240,650,000	258,970,000	증) 18,320,000
2차	142,450,700	223,320,000	증) 80,869,300	201,400,000	219,720,000	증) 18,320,000

○ 증가된 용역비(99,190천원)는 서울시에서 교부한 “제설대책 추진 자치단체경상

보조금(100,000천원)”을 사용

▢ 조치계획

○ 상기 보고내용과 같이 설계변경(정산)을 시행코자 함.

	강 남 구
(		도로관리과	)

【 관련 규정 및 제반사항 사전검토서 】
검토분야	확인 및 적시사항
관련 규정 및 근거	현행 관련 법, 시행령, 조례, 규칙, 관련 지침 등 근거를 모두 검토하고 적시하였습니까?
	• 지방자치단체를 당사자로하는 계약에 관한 법률 제22조 • 지방자치단체를 당사자로하는 계약에 관한 법률 시행령 제74조
추진 경위	추진 경위는 무엇입니까?
	• 추진경위 : 비상근무 발령에 따른 실 작업 및 대기 시간 증･감 사항 반영
예산 사항	산출 근거 및 기준 또는 예산확보 및 투입우선순위 등의 내용을 검토하고 적시하였습니까?
	• 예산확보 완료
수혜자 및 범위	이 업무(사업)관련 수혜자는 누구이며 수혜범위를 파악해 보았습니까?
	• 강남구 구민
분 야 별 검토사항 [계속 : ] [신규 : ]	이 업무(사업)과 관련하여 아래 등 제반사항을 검토해 보았습니까? ⓛ 관련부서 협조 ----------------- ( ) ② 이해관계인 및 에상되는 민원 ----------------- ( ) ③ 추진상 사전 걸림돌 ----------------- ( ) ④ 미래행정 수요예측 ----------------- ( ) ⑤ 시장조사 ----------------- ( ) ⑥ 민간부분(시설 등)과의 경제성 및 효율성 등 비교 ------ ( ) ⑦ 업무 매뉴얼 및 관련 법규 ----------------- ( ) ⑧ 행사관련 의전 및 선거법 ----------------- ( ) ⑨ 투융자 심사 등 관련절차 준수 ----------------- ( )
	• 위 언급한 사항은 반드시 검토하고 해당되는 사항에 체크한 다음, 해당 사항을 요약 작성하세요
타 기관 사 례	타 구 사례를 파악, 비교해 보았습니까?
	• 물량 증감사항에 대하여 설계변경 시행
전문가 자 문	전문가의 자문이나 검토를 받았습니까?
	• 해당사항 없음

- 2017/2018년 區, 洞 제설대책 민간위탁 용역(장기계속) -

설계변경(정산) 시행 계획

2017/2018년 제설대책 비상근무 발령에 따른 실 작업 및 대기 시간을 반영하여 2017/2018년 區ㆍ洞 제설대책 민간위탁 용역의 설계변경(정산)을 다음과 같이 시행코자 함.

1		강설 및 비상근무 현황

구 분	강설현황		비 상 근 무 현 황					비 고
	횟수	적설량	계	보강	1단계	2단계	3단계
2017/2018	13회	26.4cm	26회	15회	10회	1회	-
2016/2017	8회	17.9cm	19회	12회	6회	1회	-	참고 사항

2		용 역 개 요

용 역 명		2017/2018년 區 제설대책 민간위탁 용역	2017/2018년 洞 제설대책 민간위탁 용역
용역기간	총차	2017. 11. 01 ~ 2018. 3. 31	2017. 11. 01 ~ 2018. 3. 31
	2차	2018. 01. 01 ~ 2018. 3. 31	2018. 01. 01 ~ 2018. 3. 31
계약금액	총차	356,790,700원	240,650,000원
	2차	142,450,700원	201,400,000원
계 약 자		성준산업개발㈜ 정성수	성준산업개발㈜ 정성수
예산과목		도로관리과, 도로시설관리, 재해(설해)예방관리대책, 제설대책, 민간이전, 민간위탁금

3		설계변경 내용

▢ 설계변경 사유 : 제설대책 비상근무 발령에 따른 실 작업 및 대기 시간 반영

▢ 주요공종 증ㆍ감 내역

○ 區 용역

공 종	단위	총차		2차		비고 (증감)
		당초	변경	당초	변경
15톤 덤프트럭(주간, 가동)	시간	384	344	131	91	감) 40
15톤 덤프트럭(야간, 가동)	시간	320	214	230	124	감) 106
운전원(주간, 대기)	시간	520	967	124	571	증) 447
운전원(야간, 대기)	시간	520	872	164	516	증) 352
작업원(주간)	시간	528	1,306	167	945	증) 778
백호우(대기)	시간	30	677	0	647	증) 647

○ 洞 용역

공 종	단위	총차		2차		비고 (증감)
		당초	변경	당초	변경
제설작업(1톤, 주간)	시간	960	897	809	746	감) 63
제설작업(2.5톤, 주간)	시간	120	153	108	141	증) 33
제설작업(5톤, 주간)	시간	80	124	72	116	증) 44
덤프트럭(1톤, 대기)	시간	1,920	2,486	1,728	2,294	증) 566
운전원(주간, 대기)	시간	1,160	1,682	1,044	1,566	증) 522

▢ 용역비 증ㆍ감 사항

(단위 : 원)

구분	區 용역			洞 용역
	당초	변경	증ㆍ감	당초	변경	증ㆍ감
총차	356,790,700	437,660,000	증) 80,869,300	240,650,000	258,970,000	증) 18,320,000
2차	142,450,700	223,320,000	증) 80,869,300	201,400,000	219,720,000	증) 18,320,000

○ 증가된 용역비(99,190천원)는 서울시에서 교부한 “제설대책 추진 자치단체경상  보조금(100,000천원)”을 활용 [서울시 도로관리과-518, 2018. 1. 10]

4		조 치 계 획

▢ 상기 보고내용과 같이 2017/2018년 區ㆍ洞 제설대책 민간위탁 용역 (장기계속)에 대한 설계변경(정산)을 시행코자 함.

붙임  1. 설계변경 내역서 각 1부.

2. 제설대책 비상근무 발령 현황 1부.

3. 2018년 제설대책 추진비 교부 통보 공문 1부.  끝.