문서번호	기술심사담당관-5202
결재일자	2018.3.23.
공개여부	대시민공개
방침번호	행정2부시장 방침 제49호

				시 민
주무관	기술지원팀장	기술심사담당관		행정2부시장
오영진	류용열	김홍길		03/23 김준기
협 조
	기술관리팀장		이상석
	토목심사팀장		조임남
	건축심사팀장		도태환

건설공사장 외부전문가 기동점검단 활동결과 보고(2월)

2018.  3.

서울특별시

기술심사담당관

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	■	□	외부전문가 주관 점검실시
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 여성, 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	■	□
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	■
홍 보	● 사업홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	■	□

건설공사장 외부전문가 기동점검단 활동결과 보고(2월)

우리시 주요 공사현장을 대상으로 실시하고 있는 「외부전문가 기동점검단」의 `18년 2월 중 활동 결과에 대하여 보고 드림

1. 점검개요

점검일자	2018. 2. 21.(수)	2018. 2. 23.(금)	2018. 2. 27.(화)	비 고
공 사 명	마곡지구9단지 아파트 건립공사	여의교 확장공사	위례지구 택지개발사업 단지조성공사(3공구)
사업부서	서울주택도시공사	도시기반시설본부	서울주택도시공사
공사기간 (공정률)	`17.01. ~ `19.10.(11%)	‘16.11.30. ~ ’18.05.29.(63%)	‘15.12.10. ~ ’19.07.10.(51%)
점검자	· 에이톰엔지니어링 강창선 · ㈜이아건설 최광현 · 포스코A&C 최범종 (직원 : 건축심사팀 3)	· 수성엔지니어링 강병윤 · 유케이이엔씨 유병률 · 동부엔지니어링 김구환 (직원 : 토목심사팀 2)	· 서일대학교 이봉열 · ㈜바우컨설턴트 김태흥 · 상현엔지니어링 유상건 (직원 : 기술관리팀 2)

2. 중점 점검사항

❍ 현장대리인, 책임감리원 등 근무 실태

- ONE-PMIS에 작업일보 작성 및 현장내 장비와 인력투입현황 관리여부

- 현장반입 건설기계 임대차 계약서 작성, 대여대금 지급보증서 교부여부 확인

- 현장대리인 및 참여기술자(감리원) 현장근무 여부 확인 등

❍ 토공 및 가시설 설치상태 등 안전관리 실태

- 건설장비(타워크레인 및 천공기 등) 안전관리실태 점검

- 지하 시설물에 대한 관리, 가시설의 설치 지연 및 관리실태 점검

- 해빙기 대비 공사장 안전관리 실태

❍ 구조물에 대한 품질․공정관리 등 시공관리

- 교량 바닥슬래브 및 난간 시공상태, 기존 교량 차로 확장 계획 점검

- 공사 시공 및 품질관리 상태 점검

3. 점검결과

□ 총 지적사항

공 사 명	계	안전관리	품질관리	기 타
계	30	13	16	1
마곡지구9단지 아파트 건립공사	16	10	6	-
여의교 확장공사	6	1	5	-
위례지구 택지개발사업 단지조성공사(3공구)	8	2	5	1

□ 분야별 주요 지적사항

안전관리 분야

- 장지1교 교량받침의 적정 연단거리 확보여부 검토 요함(도로교 설계기준 등 관련 설계기준 참조).(위례지구 택지개발사업 단지조성공사 3공구)

- 1층 Transfer Girder는 춤이 크고 중량이 무거우므로 거푸집, Support는 별도 구조 설계반영 요함.(마곡지구 9단지 아파트 건립공사)

- 타워크레인 안전관리를 위한 풍향계, 수직계 등 계측기 설치 요하며, 계측관리 자료의 지속적 관찰 후 조치 요함.(마곡지구 9단지 아파트 건립공사)

- 지하주차장 부력방지를 위한 배수시설을 우기철 전에 설치 요함(마곡지구 9단지 아파트 건립공사)

- 장지1교 인접 가설울타리가 일부 미설치 되어 있고, 공사용 자재 및 폐기물 처리상태가 미흡하므로 조속히 조치할 것.(위례지구 택지개발사업 단지조성공사 3공구)

- 지반 계획고 및 하수관 구배 등을 고려하여 맨홀 및 하수관의 설치 심도의 적정여부에 대하여 검토할 것.(위례지구 택지개발사업 단지조성공사 3공구)

품질관리 분야

- 형틀공사 부적정에 따른 조치요함.(마곡지구 9단지 아파트 건립공사)

· 장선 Support 고정시  못박음 철저

· Support 수직도 유지, 수평 연결대 확인

· 계단 첼판 설치 시 면목처리

- 철근의 피복두께 과다부분이 존재하므로 이에 대해 콘크리트 타설전 철근의 피복 두께를 재확인 하여 유효춤이 작아지지 않도록 조치 요함.(마곡지구 9단지 아파트 건립공사)

- 기초 Con’c 타설 직후 기둥 부위 Con’c 침하로 인한 균열 방지를 위해, Con’c 타설 직후 lapping 하여 water gain이 발생하지 않도록 조치.(마곡지구 9단지 아파트 건립공사)

- Raker 구간 처리방안으로 Box-out 처리 보다는 방수 및 골조처리 시 유리한 매립 타설 후 제거하는 방안 검토 요함.(마곡지구 9단지 아파트 건립공사)

- 신설 보행교량 바닥슬래브에서 물고임 발생 등 배수가 불량하므로 유도배수로 검토 요하며, 아치교 강상판 구간도 원설계자와 협의하여 방수공 시행을 검토 요함.(여의교 확장공사)

- 장지1교 슬래브 신축이음장치 고정철근이 노출되지 않아 고정철근 시공여부에 대하여 확인하고 시공상세도 작성 후 시공할 것.(위례지구 택지개발사업 단지조성공사 3공구)

- 장지1교 보도부 하부 통신관 (PVC관) 시공 및 관리상태 미흡하므로 콘크리트 품질관리를 위하여 통신관(PVC관) 사이의 간격을 반드시 유지토록 조치하고 통신사업자 시공관리를 철저히 할 것.(위례지구 택지개발사업 단지조성공사 3공구)

- 장지1교 보도부 상부슬래브 표면에 다수의 소성수축균열이 발생되어 있으므로 콘크리트 양생 등 품질관리를 철저히 하고 손상이 심한구간에 대해서는 면 보수(정리)처리 할 것.(위례지구 택지개발사업 단지조성공사 3공구)

기타 관리 분야

- 기존 교량 보차도 및 보도 철거시 바닥슬래브 손상 우려되므로 여의교 연석 철거 시에는 기존 슬래브의 손상이 없도록 와이어쏘 컷팅 적용 등 구조물 유지관리부서와 협의하여 재검토 할 것.(여의교 확장공사)

- 봄철 집중호우 등 풍수해 대비하여 토공작업 진행에 따라 현장여건에 맞는 가배수로 및 침사지 운용계획 재정비할 것.(위례지구 택지개발사업 단지조성공사 3공구)

4. 조치 내용

□ 지적사항은 점검 당일 시공업체 및 감리단(감독)에 통보하여 즉시 시정토록 조치하였으며,

□ 발주부서에 지적사항 조치완료 시까지 지속 관리토록 공문 시행

붙임 : 점검 주요 지적사례 1부.  끝.