문서번호	정수시설과-2563
결재일자	2018.3.23.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
주무관	정수시설과장	영등포아리수정수센터소장
김기홍	유영춘	03/23 이성락

설계변경 심의위원회 개최 결과보고

[기계설비 유지보수 공사(연간단가)]

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2018. 3.

영등포아리수정수센터

정수시설과

설계변경 심의위원회 개최 결과보고

기계설비 유지보수 공사 시행중 물량 증․감 및 신규공정 발생에 따른 설계변경 사유가 발생하여 자체 심의위원회를 개최하고 심의의결내용에 따라 아래와 같이 설계변경을 시행코자 함.

공사현황

공 사 명 : 기계설비 유지보수 공사(연간단가)(장기계속)

도 급 자 : 유한회사 삼정수도 대표 정진욱

공사개요 : 모터펌프 분해정비 및 엑츄에이터 수리 등

도 급 액

- 총차 : 금235,462,370원

- 1차 : 금215,919,000원

- 2차 : 금19,543,370원

공사기간

- 총차 : 2017. 5. 2. ~ 2018. 3. 31.

- 1 차 : 2017. 5. 2. ~ 2017. 12. 27. 준공

- 2 차 : 2018. 1. 1. ~ 2018. 3. 31.

심의위원회 심의결과

위 원 장 : 정수시설과장

위   원 : 시설6급 김진수 외 3명, 간사 1명

일   시 : 2018.3.23(금) 10:00 ~ 11:00(2층 사무실)

안   건 : 기계설비 유지보수 공사 설계변경 적정성 여부 및 내역 검토

심의결과 : 적정함

심의위원회 심의내용

시공물량 증 ․ 감에 대한 적정성 검토

신규공정 산출, 적용 적정성 검토

제경비 정산(보험료 정산 등) 적정성 검토

변경 공사비

구 분	총공사비
	총 차	1차	2차
변 경 전	￦235,462,370	￦215,919,000	￦19,543,370
변 경 후	￦235,462,370	-	￦19,543,370
증 감 액	증감없음	17.12.27.준공	증감없음

조치의견

위와 같이 시공물량 변동 및 신규공종 발생으로 인한 설계변경을 자체 심의위원회 심의결과에 따라 설계변경을 시행코자 합니다.

붙임 : 심의위원회 의견서 1부.  끝.