문서번호	기전과-1765
결재일자	2018.3.27.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

		시 민
★주무관		기전과장
박태준		03/27 정판식
협 조

교통신호등 원인자부담공사 실정보고 검토 보고

「오금보금자리 주택지구조성」

2018.  3.

동부도로사업소

(기 전 과)

교통신호등 원인자부담공사 실정보고 검토 보고

오금보금자리 주택지구조성 교통신호등 설치공사 원인자부담공사 현장 실정보고가 접수되어 검토보고 드림.

Ⅰ

관 련 근 거

○ 기전과-7205호(2016.06.17.) 교통신호등 설치공사 원인자부담공사 승인 통보

○ 대영유비텍㈜ 대영GE18C-03-08호(2018.03.21.)

Ⅱ

공 사 개 요

○ 공 사 명 : 오금보금자리 주택지구조성 교통신호등 설치공사(원인자부담공사)

○ 공사기간 : 2016. 06. 17. ∼ 2018. 04. 08.

○ 공사내역 : 제어기 1대, 지주 27본, 신호등 23조, 잔여표시기 14조, 음향신호기 16대 외 1식

○ 원 인 자 : 서울주택도시공사(전기공사부)

○ 감 리 원 : 대영유비텍(주) 책임감리원 나정호

○ 시 공 사 : 효진전기(주)

Ⅲ

실정보고 현황

○ 보고내용

공사장소	관련근거 (규제심의)	보 고 내 용	검 토 결 과	비 고
송파구 오금동 89-7 (성내7교)	서울지방경찰청 교통관리과-8305 (2016.03.30.)	1. 관련근거 : 경찰서 규제심의 공문 - 서울지방경찰청 교통관리과-8305(2016.03.30.) 2. 성내7교 현장 규제심의 설계도면상 황단굴착은 지중화 케이블시공이 원칙이나, 교각상에 굴착이 불가능한 관계로 교각 하단부에 신호케이블 지중화 시공(Steel관)을 하고자 함.	○ 승 인 - 시민 통행에 불편이 없도록 시공 할것
	송파경찰서 교통과-2520 (2018.03.07.)	1. 관련근거 : 경찰서 규제심의 공문 - 송파경찰서 교통과-2520(2018.03.07.) 2. 위호와 관련 규제심의 변경에 따른 성내7교 교각상에 설치된 횡단보도 2개소 삭선 공정을 시공에 반영하고자 함.	○ 승 인 - 시민 통행에 불편이 없도록 시공 할것

Ⅳ

검 토 결 과

○ 오금보금자리 주택지구조성 교통신호등 설치공사 원인자부담공사 현장 실정

보고서를 검토한 결과 위와 같이 승인하고자 합니다.

붙임 : 1. 현장 위치도 1부.

2. 서울지방경찰청 규제심의 공문 1부.

3. 송파경찰서 규제심의 공문 1부.

4. 감리 실정보고서 1부.  끝.