위기상황에 나와 가족의 안전, ＇서울안전앱＇ 으로 지켜주세요!
	서울특별시
수신	재무과장
(경유)
제목	용역 변경계약(준공기한 연기)의뢰

1. 공공개발센터-2730(2018.03.23)호와 관련입니다.

2. 우리부서에서 추진중인「서부간선도로 일대 유휴부지 활용 기본구상 수립용역」에 대하여 아래와 같이 변경계약을 의뢰합니다.

가. 용 역 명 : 서부간선도로 일대 유휴부지 활용 기본구상 수립

***********************

다. 용역기간

- 당 초 : 2017.7.27. ~ 2018.3.27.

- 변 경 : 2017.7.27. ~ 2018.4.27.

라. 계약금액 : 변경없음

**********

**********************************

*********************************

바. 예산과목 : 도시재생본부 공공개발센터, 도시개발의 공공성 강화, 도시발전 및                     공공개발(도시개발), 토지자원의 선제적관리 및 사전협상제도와 시민참여                   프로그램 운영, 시설비 및 부대비, 시설비

**************************

*************************

***********************

	공공개발센터장
주무관	장수련		개발사업팀장	신윤철		공공개발센터장	03/27 이상면
협조자	계약1팀장	조현
시행	공공개발센터-2911	(		)	접수		(		)
우	04524	서울특별시 중구 세종대로 110 (태평로1가)	/
전화		/전송		/		/	부분공개(5)