위기상황에 나와 가족의 안전, ＇서울안전앱＇ 으로 지켜주세요!
	서울특별시
수신	재무과장
(경유)
제목	준공기한 연기의뢰(차집관로 성능개선 기본 및 실시설계 용역)

우리시에서 시행 중인 “차집관로 성능개선 기본 및 실시설계 용역”에 대하여 아래와 같이 준공기한 연기를 의뢰하오니 조치하여 주시기 바랍니다.

1. 용 역 명 : 차집관로 성능개선 기본 및 실시설계 용역

2. 계약상대자 : (주)이산 외 2개사

3. 준공기한 연기 내역

- 당초 : ‘18.03.31. → 변경 : ‘18.06.30

4. 도 급 비 : 변경없음

5. 지체상금 부과여부 : 미부과

붙임 : 가. 준공기한 연기보고서 1부

나. 준공기한 연기의뢰서 1부

다. 합의각서(기간연장) 1부. 끝.

	물재생시설과장
주무관	김병오		물재생운영팀장	정훈모		물재생시설과장	03/27 이인근
협조자
시행	물재생시설과-4293	(		)	접수		(		)
우			/
전화	2133-3831	/전송		/		/	대시민공개