투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울대공원
수신	총무과장
(경유)
제목	"서울대공원 황새마을 시설개선 기계설비공사" 준공기한 연기에 따른 변경계약 의뢰

1. 시설과-1428(2018.3.16.)호와 관련입니다.

2. 우리 대공원에서 시행중인 “서울대공원 황새마을 시설개선 기계설비공사”에 대해 다음과 같이 준공기한 연기에 따른 변경계약을 의뢰하오니 처리하여 주시기 바랍니다.

가. 변경내용

연번	계약건명	계약자	준공기한		비 고
			변 경 전	변 경 후
1	서울대공원 황새마을 시설개선 기계설비공사	자연엔지니어링㈜ 대표 김순영	2017.10.17 ~ 2018.3.31	2017.10.17 ~ 2018.4.30	30일연장

나. 준공기한 연기사유

- 건축 등 선행공정인 “서울대공원 황새마을(작은물새장) 시설개선공사”의 준공기한이        ‘18.4.30까지 연기됨에 따라 후속 전기공사의 연기가 필요

다. 지체상금 부과대상: 미부과

라. 공사금액: 변경없음

붙임  1. 준공기한 연기 보고서 1부.

2. 합의각서 1부.  끝.

	시설과장
주무관	이재균		주무관	조대복		시설과장	03/27 代이춘한
협조자	주무관	정한성
시행	시설과-1656	(		)	접수		(		)
우	13829	경기도 과천시 대공원광장로 102	/	http://grandpark.seoul.go.kr
전화	02-500-7422	/전송	02-507-7230	/	ioupower@seoul.go.kr	/	부분공개(5)