문서번호	공간정보과-2353
결재일자	2018.3.29.
공개여부	부분공개(7)
방침번호

				시 민
주무관	공간정보과장	시설안전부장		상수도사업본부부본부장
홍석현	채재일	강신재		03/29 구아미
협 조	주무관		김영혁
	주무관		박현대

2017년 상수도 GIS DB 정확도 개선사업

준공기한 연기 검토보고

2018. 3.

	상수도사업본부
	공간정보과

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	∎
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	∎
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	∎
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	∎
성별분리통계	● 성별분리통계 작성여부를 검토하였습니까? 예) 인적통계 남·여 구분, 수혜집단의 남·여 구분 등	□	∎
일자리	● 일자리 창출 효과 및 일자리 수를 검토하였습니까? 예) 직·간접 채용, 취업알선, 전문인력양성, 창업지원 등	□	∎
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	∎
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	□	∎
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	∎
홍 보	● 사업 홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	∎
정 책 영문화	● 정책 영문화 및 해외홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 영문 제목‧요약, 해외 언론 보도, 외국어 홈페이지 등	□	∎
바른 우리말	● 불필요한 외국어·외래어 표현 대신 바른 우리말을 사용하였습니까? 예) 스페이스, 플랜, 앵커시설, 거버넌스, 인큐베이팅, 매칭 등	□	∎
결재문서공개	● 공개 여부를 “비공개”로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? 예) 정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호	∎	□	용역 해당 업체에 정당한 이익을 해할수 있음
지속 가능성	● 정책·계획 등의 지속가능성을 검토하였습니까? 예) 지역경제 발전, 사회적 형평성, 환경의 보전 등	□	∎

2017년 상수도 GIS DB 정확도 개선사업

준공기한 연기 검토보고

『’18 상수도 GIS DB 정확도 개선사업』 업체 선정시까지 업무공백에 따라 『’17 상수도 GIS DB 정확도 개선사업』 준공기한 연기 검토를 보고 드림.

□ 용역개요

❍ 사업현황 : 총 434㎞,  *******백만원

구 분	서북 지역	서남 지역	동남 지역
용역내용	측량 및 편집 : 162㎞ (신설 44, 기존 118)	측량 및 편집 : 121㎞ (신설 29, 기존 92)	측량 및 편집 : 151㎞ (신설 51, 기존 100)
용역기간	’17. 2. 23.~’18. 3. 31.
계약금액	*******백만원	*****백만원	*****백만원
사 업 자	********* ****************	********** ****************	******** *******************
해당사업소	중부, 서부. 북부	강서, 남부	동부, 강남, 강동

□ 용역 사업기간 검토

❍ ’18년도 용역발주 지연

- 「’18년 상수도 GIS DB 정확도 개선사업」권역수․물량 증대

․ 권역수 증가 : ’17년 3개 권역 ⇒ ’18년 4개 권역

․ 물량 확대 : ’17년 약 434㎞ ⇒ ’18년 약 783㎞

- ’18년도 용역 착공시까지 최소 1개월이상 업무공백 발생

․ ’18. 4월초 용역 입찰공고(긴급) 예정

․ ’17년도 용역기간 : ’17. 2. 31.~’18. 3. 31.

< ’17-’18년도 용역비교 >

구 분	2017년 상수도 GIS DB 정확도 개선사업	2018년 상수도 GIS DB 정확도 개선사업	증 가
용역권역	3개 권역 (서북, 동남, 서남)	4개 권역 (중부․서부, 북부․동부, 강서․남부, 강남․강동)	1개 권역수 증
용역물량	총 434㎞ (신규 124, 기존 310)	총 782.7㎞ (신규 121, 기존 661.7)	180% 증
사 업 비	******* 백만원	***** 백만원	******

❍ ’18년도 용역 추진경위

- ’************************************************

- *************************************

- *********************************

- ’18. 3. 9. : 사전규격공개 (나라장터)

- ’18. 3. 29. : 사전규격공개 의견검토

❍ ’18년도 용역 향후 일정

- ’18. 3월말 : 용역발주 의뢰 (본부→재무과)

- ’18. 4월초 : 입찰공고(긴급 10일) (재무과)

- ’18. 4월중 : 제안서 평가 및 사전준비

- ’18. 4월말 : 계약 및 용역시행

*****************************************************

❍ 용역발주 공백기****** 동안 상수도공사 내역

구 분		서북 지역	서남 지역	동남 지역
사업소		중부, 서부. 북부	강서, 남부	동부, 강남, 강동
공사현황	송배 수관	********** **************************	********** ***********************)	-
	배급 수관	**************** ********************	*************** ********************	**************** ******************** ********************
	급수 공사	급수공사 중 (배수관~급수관)

□ 처리대책

❍ 「’18년도 상수도 GIS DB 정확도 개선사업」의 발주 권역수 증대 및 용역 물량 확대에 따른 발주지연으로 업무공백이 발생하여

************************************** ***********************.

❍  ’18년도 용역업체 착공시까지 ’17년도 상수도 GIS DB 정확도 개선사업에 대한 준공기한을 연기코자 함.

********************************************

□ 준공기한 연기

❍ 연기사유

- 「’18년 상수도 GIS DB 정확도 개선사업」의  발주 권역 증대 및 용역 물량 확대에 따른 발주 지연으로 업무 공백시 상수도공사 대응

❍ 연기사유 귀책사유 : 발주청

❍ 지체상금 부과여부 : 미부과

❍ 준공기한 연기

- 용역명 □ 2017년 상수도 GIS DB 정확도 개선사업(서북)

□ 2017년 상수도 GIS DB 정확도 개선사업(동남)

□ 2017년 상수도 GIS DB 정확도 개선사업(서남)

- 용역기간 (91일 연기)

구 분	변 경 전	변 경 후
용역기간	’17. 2. 23.~’18. 3. 31.	’17. 2. 23.~’18. 6. 30.

끝.