문서번호	정수시설과-1131
결재일자	2018.3.29.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		정수시설과장
김현철		03/29 김석정
협 조

2017년도 전기공사(연간단가)2차

전기설비 보수공사 작업완료 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2018. 3. 29

뚝도아리수정수센터

(정수시설과)

2017년도 전기공사(연간단가)2차

전기설비 보수공사 작업완료 보고

2017년도 우리 정수센터 전기설비의 효율적인 유지보수를 위한 보수공사(연간단가)2차 작업지시 사항(4~6차)을 완료하였기에 보고 드림

□ 사업개요

◯ 사 업 명 : 2017년 뚝도아리수정수센터 전기설비 보수공사(연간단가)2차

◯ 사업기간 : ’18.1.1 ~ 3.31(총기간 ’17.4.24~’18.3.31)

◯ 계약금액 : 금22,840,000원(총부기금액 : 121,000,000원)

◯ 계 약 자 : (주)중부전기건설 대표 조중건

□ 작업지시 및 완료보고

◯ 작업지시 사항 : 붙임 1 작업지시서(4~6차)

구분	4차	5차	5차 추가	6차
기간	1.29 ~ 2.09	3.6 ~ 3.9	3.6 ~ 3.9	3.13 ~ 3.15
내용	구 제어실 및 시험실의 UPS,DATA분배함,분전반 등 철거	구내식당 전기온수기 전원공급	소방시설작동기능 결과보고 -정수시설과-677 (18.02.27) 열감지기 및 피난구유도등 약품투입동 수신기회로점검	구내식당 간선케이블 포설
	자양취수장 염소중화실 누액감지기 설치	-		전식측정단자함 이설 (서울숲 부지→센터)
	경비동 방호시스템용 UPS구매설치	-	-	-
	제어실 및 시험실 케이블 철거	-	-	-

◯ 작업완료 보고 : 붙임2 작업 완료보고 및 사진

□ 설계변경 사항 발생

◯ 설계변경 금액내역 - 변경없음

구 분	총부기금액	당초	변경	증 ․ 감
공급가액	110,000,000	20,763,636	20,763,636	-
부가가치세	11,000,000	2,076,364	2,076,364	-
도급금액	121,000,000	22,840,000	22,840,000	-

◯ 신규공종 및 시공물량 증․감에 따른 변경

가. 신규공종 발생

- 구 제어실 UPS, 케이블 등 철거 1식 및 감지기 설치 등 7 공종 발생

- 낙찰율 88.433% 적용

나. 공사  물량 증․감 사항 발생

□ 보고자 의견

○ 상기 변경사항에 대해 자체 설계변경 심의결과에 따라 설계변경

○ 설계변경 계약 및 기성준공.

붙임 1. 작업지시서  4부

2. 작업완료 보고서 및 사진  각1부.   끝.