문서번호	건축부-1336
결재일자	2018.1.30.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		복지시설과장	건축부장
오명희		조영수	01/30 임인구
협 조

- 서울창업허브 별관 리모델링공사 - 예비준공검사 시행계획

2018.01.

도시기반시설본부

건 축 부

서울창업허브 별관 리모델링공사

예비준공검사 시행계획

『서울창업허브 별관 리모델링공사』의 준공가능 여부 및 미진사항을 사전 보완하고자 예비준공검사를 실시하여 준공검사 및 인계․인수준비에 만전을 기하고자 함.

공사개요

○ 공 사 명 : 서울창업허브 별관 리모델링공사

○ 건축규모 : 지상4층, 연면적 5,656.93㎡

○ 공사기간 : 2016.12.09 ~ 2018. 02.22

○ 공사금액 : 4,967,850천원

○ 시 공 자 : 두성도시건설㈜외 2

○ 감 리 자 : ㈜경호엔지니어링종합건축사사무소외 2

○ 현 공 정(공정률 : 93%)

- 건축물 내․외부 마무리공사

- 조경공사 및 부대토목공사

관련근거

○ 건설공사 사업관리방식 검토기준 및 업무수행지침 제104조(준공검사 등의 절차)

○ 예비준공검사 실시 개선대책(행정 2부시장 방침 제27호, 2014.02.06.)

- 계약금액 10억원이상, 외부전문가 합동점검 실시

○ 2018 준공(예정) 공공건축물 건립공사 예비준공검사 시행계획(건축부-1247호, 2018.01.26)

예비준공검사 개요

○ 일    시 : 2018. 02. 01(목), 15:00~

○ 장    소 : 서울창업허브 별관 리모델링공사 현장

○ 점 검 자

- 도시기반시설본부 : 건축부 소속직원 2인(시설6급 김찬유, 시설7급 이수호)

건축, 토목, 방재시설부 조경감독관

- 외부위원(2인) : 양동종(설계변경 심의위원), 유병학(설계변경 심의위원)

○ 입 회 자

- 운 영 자 : 서울산업진흥원(SBA) 담당팀장

- 사업의뢰부서 : 디지털창업과 담당팀장

- 건설사업관리용역자 : 건축·토목·조경 상주 및 비상주감리원

- 시 공 사 : 현장대리인

○ 주요 점검내용
- 공사 내용중 미비한 사항의 사전 보완
- 공사 품질확보 및 하자 발생방지를 위한 사전점검
- 인계·인수 관련 사전 보완사항 점검 등

- 정산설계도서에 의거 준공검사에 준하여 시행

행정사항

○ 외부위원 수당지급

- 지급수당 : 300,000원(150,000원×2명)

- 예산과목 : 경제진흥본부 디지털창업과, 디지털산업 육성 및 창업지원을 통한 경제활력 제고, 체계적 창업시스템 구축, 서울창업허브 조성, 시설부대비

- 지출방법 : 개인별 은행계좌로 입금

향후계획

○ 2018.02.22    : 지적사항에 대한 보완조치 완료 후 준공
○ 2018.2~3월중 : 준공검사, 시설물 인계․인수 추진

붙 임 : 1. 예비준공검사조서 양식 1부.

2. 지적사항 조치결과 보고서 양식 1부. 끝.