문서번호	동북권사업단-2815
결재일자	2018.3.29.
공개여부	부분공개(5,6)
방침번호

				시 민
주무관	기반조성팀장	동북권사업반장		동북권사업단장
김영현	장충근	代오대중		03/29 이택근
협 조

4.19 사거리 일대 도시재생활성화 계획수립

용역(1차) 준공기한 연기 보고

2018. 3.

지역발전본부

(동북권사업반)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	■
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
성별분리통계	● 성별분리통계 작성여부를 검토하였습니까? 예) 인적통계 남·여 구분, 수혜집단의 남·여 구분 등	□	■
일자리	● 일자리 창출 효과 및 일자리 수를 검토하였습니까? 예) 직·간접 채용, 취업알선, 전문인력양성, 창업지원 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	□	■
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	■
홍 보	● 사업 홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
정 책 영문화	● 정책 영문화 및 해외홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 영문 제목‧요약, 해외 언론 보도, 외국어 홈페이지 등	□	■
바른 우리말	● 불필요한 외국어·외래어 표현 대신 바른 우리말을 사용하였습니까? 예) 스페이스, 플랜, 앵커시설, 거버넌스, 인큐베이팅, 매칭 등	■	□
결재문서공개	● 공개 여부를 “비공개”로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? 예) 정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호	■	□

4.19 사거리 일대 도시재생활성화 계획수립

용역(1차) 준공기한 연기 보고

「4.19사거리 일대 도시재생활성화 계획수립 용역」(장기계속사업)의 1차분 용역 관련 현장지원센터와 연계한 과업수행에 추가시일이 소요됨에 따라 용역 준공기한을 연기코자 함.

□ 용역 개요

○ 용 역 명 : 4.19사거리 일대 도시재생활성화 계획수립 용역

○ 용역업체 : 어반플롯건축사사무소, ㈜다정엔지니어링

○ 계약금액 : 580,000천원 (1차 – 151,200천원/ 2차 - 428,800천원)

○ 용역기간 : ’17.11.20. ~ ’18. 12.15.(1차 -’17.11.20. ~ ’18. 03.31.)

○ 과업내용

- 대상지역 현황 · 여건 분석을 통한 평가·진단

- 활성화 기본 구상 및 도시재생활성화계획 수립

- 재원조달 및 도시재생활성화 사업 실행계획 수립

- 거버넌스 등 도시재생 관련 조직 구성·운영 및 지속추진 방안 마련

- 도시재생사업의 평가 및 점검계획

	〈1차 과업 〉
∙ 대상지역 현황 · 여건 분석을 통한 평가·진단 ∙ 활성화 기본 구상 ∙ 주민참여 활성화 및 역량강화(일부)

□ 추진 경위

○ ‘17.11.20.	: 용역 계약 · 착수

○ ‘17.11.28.	: 용역 착수보고

○ ‘17.12 ~ ’18.03   : 총괄코디네이터 정례회의 7회, 용역사 실무회의 38회

주민설문조사 2회, 주민심층인터뷰 25회, 관계기관 설명회 6회

○ ‘18. 3.19.	: 도시재생현장지원센터 인력구성 및 운영

○ ’18.  3.26.	: 도시재생위원회 자문(안) 전문가 자문회의

□ 변경계획

○ 과업기간(1차) 연장 : (당초)  ‘18. 03.31. → (변경) ‘18. 04. 30.

구 분		내 용	비 고
용역계약 (기간)변경	당 초	‘17.11.20. ~ ‘18.03.31.
	변 경	‘17.11.20. ~ ‘18.04.30.

※ 총용역기간: 변경없음(’17.11.20. ~ ’18. 12.15)

○ 연장사유

- 현장지원센터 인력구성 및 운영 등 지연으로 ‘주민참여활성화 및 역량강화’ 등 추가기간 필요

○ 지체상금 : 미부과 (귀책사유 : 서울시)

□ 향후 일정

○ ‘18. 3. 30. : 용역(1차) 준공기한 연기 및 변경계약 체결

○ ‘17. 4. 30  : 용역(1차) 과업 완료

붙임  계약상대자 준공기한 연기 요청 공문 및 합의각서 1부.  끝.