문서번호	도로포장연구센터-500
결재일자	2018.3.29.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		도로포장연구센터장	품질시험소장
윤상열		백종은	03/29 한민희
협 조
	도로관리팀장			최연우
	도로포장안전팀장			임영철
	주무관			김태우

2018년

도로포장 상태 조사 및 분석 용역 시행

2018. 03.

서울특별시품질시험소

(도로포장연구센터)

2018년

도로포장 상태 조사 및 분석 용역 시행

특별시도의 효율적인 운영·관리를 위해 도로포장 상태에 대해  전수 조사·분석 및 장기공용성(LTPP)구간에 대한 추적조사·평가·DB구축 등의 업무 수행을 위하여「2018년 도로포장 상태 조사 및 분석」용역을 시행하고자 함

Ⅰ	용역 개요

□ 용 역 명 : 2018년 도로포장 상태 조사 및 분석

□ 소요예산 : 1,500백만원

- 예산과목 : 도로관리과, 도로시설물관리, 도로및도로부속물 관리(도시개발),

노후포장도로 정비공사, 시설비

□ 과업의 목적 : 특별시도의 포장상태 현황 분석 및 보수대상 구간 및 보수공법 선정 등 유지보수 전략 수립

가. 특별시도 도로포장 노면상태 전수조사

나. 특별시도 포장수준 평가에 따른 최적 유지관리를 위한 보수구간 및 보수공법, 보수우선순위 결정

다. 특별시도 도로포장의 장기적 유지보수 전략수립을 위한 장기공용성 추적조사 및 분석

라. 특별시도 도로포장 유지관리체계 개선 방안 연구(신기술·신기술 인증체계 구축, 성능보증제도 특별시방서 등)

□ 과업의 대상 : 특별시도 전역

□ 과업의 범위

가. 공간적 범위 : 특별시도 1,307㎞(차로연장 6,792㎞)에 대한 전수 조사·분석 및 장기공용성 추적조사·분석

구 분		2018년 조사·분석
		품질시험소	계약상대자
- 특별시도 포장상태 조사	일반 조사	2,000㎞	4,792㎞
	장기공용성 추적조사	300㎞	-
- 특별시도 포장상태 조사자료 분석			7,092㎞

나. 시간적 범위 : 착수일로부터 2019년 02월 28일까지

□ 주요 과업내용

가. 특별시도 포장상태 조사

1) 특별시도 포장상태 조사 계획 수립

2) 포장상태 조사방법 신뢰성 평가

3) 특별시도 포장상태 전수 조사

나. 포장상태 조사자료 분석 및 평가

1) 표면결함, 소성변형, 평탄성 자료 분석

2) 특별시도 포장상태 분석(전체, 노선별, 도로기능별, 사업소별 등)

3) 주요파손별 원인 분석

4) 도로포장 준공 직후 및 하자보수기간 포장상태 분석

5) 동질성 분석을 통한 보수대상구간 선정

6) 예산수립을 위한 보수공법(안) 및 보수우선순위 결정

7) 효율적인 도로포장 유지관리를 위한 장·단기 소요예산 분석

8) 포장도로관리시스템 개선 방안 수립

9) 부록(조사·분석 현황표 등) 작성

10) 기타 제안사항

다. 장기공용성 추적 조사·분석 및 D/B 관리

1) 기존(‘14년 ~’17년도) 장기공용성구간 추적 조사·분석

2) 신규(‘18년도) 장기공용성구간 선정 및 조사·분석

3) 장기공용성 추적조사 D/B 업데이트 및 개선

라. 신기술·신공법 인증 체계 개발

1) 신기술·신공법 인증 체계 도입 타당성 검토

2) 신기술·신공법 인증 체계 시행 절차 및 지침(안) 수립

3) 신기술·신공법 인증 체계 시험적용

마. 최적 보수공법 결정체계(Decision Tree, DT) 검증

1) Decision Tree 결정 보수공법 및 단면두께 검증

2) Decision Tree 신뢰성 평가 및 개선(안) 수립

바) 도로포장공사 성능보증 계약제도 적용성 연구

1) 지불계수 기반 성능보증 계약제도의 공학적·사회적·제도적 타당성 검토

2) 지불계수에 따른 준공 및 하자(성능)보증 처리 기준(안) 수립

3) 성능보증제도 도입 시험시공 및 유지관리 구간 품질지수 평가

4) 성능보증제도 시범적용을 위한 특별시방서(안) 개발

Ⅲ	용역 시행방법

□ 계약방법 : 일반공개경쟁입찰(사업수행능력평가-PQ)

용역계약 의뢰 (사업부서→재무과)	⇒	입찰공고 (재무과)	⇒	제안서 평가 (사업부서)
평가결과 통보 (사업부서→재무과)	⇒	계약체결 (재무과)	⇒	용역수행 (사업부서)

□ 입찰참가자격

가. 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 제9조, 같은법 시행령 제13조, 같은법 시행규칙 제14조 규정에 의거 소정의 자격을 갖추고,

나. 입찰참가신청 마감일 현재 엔지니어링산업진흥법 제21조 및 같은법 시행령 제33조의 규정에 의거 건설부문 중 전문분야(도로및공항)에 엔지니어링 사업자로 신고를 필한 자1)

다. 다만, 2)용역 수행시 특별시도의 장기공용성(LTPP) 구간(서울형설계법, 특수포장, 예방적유지보수 등)에 대한 추적조사, 신기술·신공법 인증 체계 적용성 검토, 최적 보수공법 결정체계 검증, 도로포장공사 계약제도 도입에 따른 개선 방안 등 고도의 전문 연구인력이 요구되는 추진과제의 성격을 고려하여 “공공기관의 운영에 관한 법률에 의거 설립된 연구기관“ “민법에 의거 연구를 할 수 있도록 설립된 연구기관과 학술단체”, 또는 “고등교육법에 의한 대학이나 대학교, 대학원(산학협력단, 부설연구기관 등 포함)”과 공동도급(분담이행방식)이 가능하며, 이 경우 공동수급체 대표자는 1)항에 해당하는 업체로 선임하여야 함.

※ 공동도급시 1)항 해당업체 참여비율은 60% 이상으로 함

※ 본 건은 중소기업제품 구매촉진 및 판로지원에 관한 법률 시행령 제2조의3(중소기업자와의 우선조달계약에 대한 예외)제1항 제4호에 의거함.

※ 도로의 노면상태, 소성변형, 종단평탄성 등을 조사할 수 있는 자동포장상태 조사장비를 보유 또는 사용승인(임차계약)을 득한 자로 낙찰시 당해 장비의 보유증명서류(임차의 경우 임대차계약서와 장비증명 서류 등)을 발주기관(품질시험소) 경유하여 제출

Ⅴ		향후계획

○ ‘18.03. : 기술용역 타당성 및 용역발주 심의 요청(기술심시담당관)

○ ‘18.04. : 일상감사 의뢰(안전감사담당관)

○ ‘18.04. : 기술용역 발주 방침서 작성

○ ‘18.04. : 구매규격 사전공개(공개일로부터 5일)

※ 조달청 내자구매업무 처리규정 제9조

○ ‘18.04. : 기술용역 공고 및 발주의뢰(재무과)

붙임 : 1) 과업내용서 1 부

2) 설계내역서  1 부.  끝.