문서번호	역사문화재과-5446
결재일자	2018.3.30.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

		시 민
주무관	역사문화재정책팀장	역사문화재과장
유지현	양지호	03/30 정영준

서울시 무형문화재 기록화사업 준공기한 연기 계획

2018. 3.

문화본부

(역사문화재과)

서울시 무형문화재 기록화 사업 준공기한 연기 계획

서울특별시 무형문화재의 원형을 보존하고 전승하기 위한 기록화 사업 추진에 있어 수준높은 도서와 영상물 제작을 위해 준공기한을 연기하고자 함

1		용역명

○ 계약건명 : 서울시 무형문화재 기록화사업

○ 계약업체 : ㈜클콩(대표: 이주원)

○ 계약금액 : 금328,645,000원(부가세 포함)

○ 계약기간 : 2017. 4. 24.~2018. 3. 30.

○ 계약방법 : 제한경쟁입찰(협상에 의한 계약)

○ 과업내용

- 대상종목 : 은공장, 오죽장, 행당동 아기씨당굿, 바위절마을 호상놀이

- 추진내용

· 영상제작 : 각 종목 보유자, 전수교육조교 등 전승자가 출연하여 시연의 전 과정 및 준비 과정을 기록 영화로 제작

· 도서제작 : 사진, 도면, 그림을 중심으로 종목별 시연을 상세하게 해설하고 보유자의 생애사 및 계보 등 각 종목에 대한 학술조사를 통해 전문적인 내용의 도서 출판

2		추진경과

○ ‘17. 4. 24. : 계약체결

○ ‘17. 5. 18. : 착수보고회 개최

○ ‘17. 12. 21.: 중간보고회 개최

○ ‘18. 1. 31 / 2. 9. : 1, 2차 시사회 개최

○ ‘18. 3. 13.~15.: 자문회의 개최

○ ‘18. 3. 23. : 디자인심의(재심의)

3		변경사항

○ 변경사항 : 준공기한 연기(증62일)

당초	변경후
2017. 4. 24.~2018. 3. 30.	2017. 4. 24.~2018. 5. 31.

○ 연기사유

- 도서의 경우 디자인심의소위원회 심의 결과 재심의 통보(시민소통담당관-4309호, ‘18. 3. 27.)됨에 따라 수정 및 재상정 필요

- 영상물의 경우 2차 시사회 후 진행된 자문회의(3월 13일~15일)에서 제기된 수정 사항 등을 반영하기 위해 준공 연기가 필요함

○ 지체상금 부과여부 : 미부과

4		향후 일정

○ ‘18. 3. : 준공기한 연기의뢰(재무과)

○ ‘18. 4. : 영상물 최종 시사

○ ‘18. 4. : 디자인 및 영상물 심의

○ ‘18. 5. : 납품 및 준공.  끝.