투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
		서울특별시도시기반시설본부
수신	내부결재
(경유)
제목	업무지시전(실정보고 승인 통보(가설 펜스 규격 변경 외 1건))

1.업무지시현장 : 동작대로(연장) 중앙버스전용차로 설치공사 (주)성림이엔씨,

주식회사 동성엔지니어링

2.작 성 일 자 : 2018-03-29

3.지 시 내 용

가. 동작건 2018-21(’18.3.7.) 및 2018-35(’18.3.21.) 관련입니다.

나. 위 호로 제출한 실정보고「가설 펜스 규격 변경」과「보도 포장구간 투수 시트 반영 및 기층 두께 변경」건에 대하여 승인 통보하오니 설계 변경에 정산 반영하시기 바랍니다.  끝.

주무관							김구			도시고속도로과장					03/30 명경출
협조자
시행			토목부-5414									(						)		접수											(						)
우	04520					서울특별시 중구 청계천로 8 프리미어플레이스빌딩 12층															/			http://infra.seoul.go.kr
전화		02-3708-8664						/전송			02-3708-2599					/	neuf@seoul.go.kr												/	대시민공개