위기상황에 나와 가족의 안전, ＇서울안전앱＇ 으로 지켜주세요!
	서울특별시
수신	재무과장
(경유)
제목	준공기한 연기요청(신정교 접속교외 4개소 실시설계 용역)

우리과에서 시행중에 있는『신정교접속교외 4개소 내진성능평가 및 내진보강    공사 실시설계 용역』에 대하여 아래와 같이 준공기한 연기를 요청하오니 조치하여 주시기 바랍니다.

가. 용 역 명 : 신정교접속교외 4개소 내진성능평가 및 내진보강공사 실시설계 용역

나. 용역기간 : ’18.01.15. ~ ’18.04.14

다. 도 급 자 : ㈜도화엔지니어링 대표자 박승우

라. 준공기한 변경 요청내용

- 당초 : ’18.01.15. ~ ’18.04.14

- 변경 : ’18.01.15. ~ ’18.05.30

마. 귀책사유 : 발주처

바. 연기사유

- “내진설계기준 공통적용”(행정안전부 국민안전처, ’17.4)본 과업 적용여부에 대한 국토부 질의(’18.3.20)회신 및 후속조치에 따른 절대공기 부족 등

※ ’18. 4월초 통보 예정

사. 예산과목

- 교량안전과, 교량관리, 일반교량관리, 교량시설물내진보강공사, 시설비및부대비, 시설비

붙임 1. 준공기한 연기 검토 보고서 1부(별도송부).

2. 준공기한 연기의뢰서 1부.

3. 합의각서 1부. 끝.

	교량안전과장
★주무관	김태형		강구조교량팀장	정회평		교량안전과장	03/30 한유석
협조자
시행	교량안전과-5498	(		)	접수		(		)
우		서울특별시 중구 덕수궁길 15(서소문동) 1동 2층	/
전화	02-2133-1964	/전송	02-2133-1429	/		/	부분공개(5)