투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시도시기반시설본부
수신자	건설총괄부장
(경유)
제 목	관급자재 변경 계약 의뢰(올림픽대로~여의도간 진입램프등 전기공사_가로등기초)

우리 본부에서 시행 중인 “올림픽대로~여의도간 진입램프 설치외 1개소 전기공사”에 소요되는 관급자재(가로등기초)에 대해 아래와 같이 변경 계약 의뢰하오니 처리하여 주시기 바랍니다.

아                     래 -

○ 변경 계약 의뢰 내용                                                     【단위: 개】

납품요구번호 (계 약 번 호)	물 품 식별번호	품 명	규 격	계약 수량		증감	계약 업체
				당초	변경
12-17-1-68435-00 (00175023000)	20548696	콘크리트기초	가로등 8.5m용	12	0	감12	㈜현암
	20549614	콘크리트기초	가로등 12m용	49	49	-

○ 변경 사유 : 노들길 가로등 설치여건 변경에 따른 가로등기초(12개) 감

붙임 : 1. 검토보고서 1부.

2. 합의서 1부.

3. 분할납품 통지서 1부.   끝.

	설비부장
★주무관	박희정		열빛총괄과장	유병기		설비부장	03/30 권오식
협조자	경리과장	최정수
시행	설비부-4168	(		)	접수		(		)
우	04520	서울시 중구 청계천로 8 프리미어플레이스 15층	/	http://infra.seoul.go.kr/
전화	02-3708-8611	/전송	02-3708-8659	/	pakei27@seoul.go.kr	/	대시민공개