문서번호	방재시설부-4156
결재일자	2018.4.2.
공개여부	부분공개(7)
방침번호

			시 민
주무관		조경시설과장	방재시설부장
김달용		신용우	04/02 이임섭
협 조

『소방행정타운 건립공사(1단계)』

조경분야 상주 건설사업관리기술자 투입변경 검토보고

2018. 03.

도시기반시설본부

(방재시설부)

『소방행정타운 건립공사(1단계)』

조경분야 상주감리원 투입계획 변경 검토보고

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

『소방행정타운 건립공사』추진과 관련하여 조경분야 상주감리원

배치계획 변경 및 조경기술자 투입 승인요청에 대한 검토 보고임.

▸관련공문 : 건원ENG 제18-608호(‘18.03.30)

Ⅰ		용역개요

○ 위    치 : 은평구 진관동 110-26일원 (소방행정타운 건립공사)

○ 규    모 : 연면적 25,174㎡ (지하2층/지상15층 6개동)

▸조경면적 16,327㎡ (대지면적 48,950㎡의 33.35%)

□교목 1,189주, 관목 37,550주, 조경시설(시설물 3종, 조경포장 3종 2,996㎡)

○ 용역기간 : 2016.05.02 ~ 2018.07.01

○ 감 리 사 : ㈜건축사사무소 건원엔지니어링 외 2개사

○ 감 리 비 : 2,665백만원

Ⅱ		실정보고

○ 조경분야 상주감리원 배치계획 변경

▸승인요청 사항

분 야 (등급)	성 명	출 생 년 도	배치기간		소 속	비 고
			당 초	변 경
조 경 (고급)	박중영	1969	‘17.12.02 ~‘18.06.01 (132일)	‘18.04.01 ~‘18.07.01 (66일)	㈜건원 엔지니어링	PQ비평가

○ 변경사유

▸2단계 공사 연속시행에 따른 조경감리원 투입시기 조정

[관련문서 : 소방행정과-7042(2018.3.23)호]

※ 2단계 전문훈련시설 공사 : ‘18.7월~’19.8월

Ⅲ		검토결과

○ 조경 감리원 자격검토

성 명	연령	학 력	기술자격	보수교육	배치기준	비 고
박중영	49	학 사 (조경학과)	조경분야 고급기술자	이 수 건설사업관리교육	적 정 고급이상	적 합

○ 투입기간 조정

▸2단계 전문훈련시설공사(지하철복합건물 등 6종)가 연계시공

됨에 따라 전체공사의 마무리 공정인 조경 추진을 후속단계로

조정하고

▸조경분야 상주감리원 투입기간은 4월부터 1단계 감리용역 종료시

(‘18.7.1) 까지 조정배치

※ 2단계 투입은 공사추진 및 관련공정 등을 고려하여 추후검토

Ⅳ		보고자 의견

○ 소방행정타운 건립공사 건설사업관리용역(감독권한대행)과 관련하여

조경분야 상주감리원을 검토한바, 유사한 현장에서 감리경험이 있고

자격조건에서 당초 배치기준(고급등급)을 충족하여 보조감리원으로

적합하고

○ 조경 상주감리원 배치기간 변경투입은 2단계 전문훈련시설 연계시공과

전체공정 추진에 따른 마감공정의 적정배치로 판단되어, 승인 및 투입

지시 하고자 함

붙임 : 1. 관련공문 1부.

2. 조감도 및 현황사진 1부.  끝.

조감도 및 현황사진

○ 조 감 도
○ 위치도‧조경계획‧현황사진
[ 위 치 도 (은평구 진관동 110-26)]	[ 조경시설 배치계획 ]
[ 소방학교 본관 및 생활관 주변 전경 ]	[ 119 특수구조단 주변 전경 ]