문서번호	도시철도설비부-3140
결재일자	2018.4.2.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
★주무관	차량과장	도시철도설비부장
양인석	강치석	04/02 구자훈

9호선 3단계 시운전 결과 보고

2018.03.30.

도시기반시설본부

(도시철도설비부)

9호선 3단계 일일 시운전 보고

2018.03.30.(금)

□ 금일실적

급 전	단 전	시험시간
08 : 28	16 : 27	08:56∼15:32

○ 시험내용

- 6량열차 전구간 저속 주행시험

○ 시운전참여인원 : 7명 (상황실 : 2명, 본부 : 명, 공사관계자 : 3명, 기관사 : 2명)

※ 급전후 차량 예열 및 점검시간 30분 필요

□ 본선 출입승인

구분	분 야 (공구)	회사명	작업구간	작업명	작업인원	비 고
1	토목	삼성물산	931~933 정거장	핸드레일설치 및 청소	고두열 외 9명	3.31~4.01 08:00~17:00
2	토목	롯데건설	934정거장	배수로청소	정정우 외 3명	3.31~4.01 07:00~18:00
3	건축	삼성물산	932~933 정거장	축소구간 판넬설치	홍상준 외 4명	3.31 08:00~17:00
4	기계	삼성물산	919공구	댐퍼테스트	유영욱 외 3명	3.31 단전후~17:00
5	통신	일광기업	931~938 정거장	통신케이블 포설	정성호 외14명	3.30~4.01 단전후~03:00
6	검수	9호선2단계 운영사	926~938 정거장	모터카 시험운행 전차선 합동점검	김종태 외15명	3.30~4.02 01:45~04:00
7	통신	SKT	931 ~ 938정거장	통신케이블 포설 및 현장 실사	안정헌외136명	3.30~4.01 단전후~04:00
8	통신	KT	936~938 본선터널	통신케이블 포설 및 단말처리작업	이성우 외24명	3.30 22:00~06:00
9	통신	LGU+	931~933 본선터널	통신케이블 포설	배상달 외32명	3.30~4.01 22:00~05:00
10	궤도	한일철도	931~932 정거장	제표기위치 수정	이재근 외 1명	4.04 22:00~04:00

□ 시운전차량

○ 편성번호 : 945편성

○ 주박위치 : 개화차량기지 입고

□ 기타 특이사항

○ 없음

□ 다음주 시험계획

○ `18.04.02.~  6량열차 전구간 고속 주행시험(신호시험)   끝.