위기상황에 나와 가족의 안전, ＇서울안전앱＇ 으로 지켜주세요!
	서울특별시
수신	재무과장
(경유)
제목	준공기한 연기의뢰(서북권패션지원센터 리모델링 공사)

1. 재무과-67431(2017.12.29.)호와 관련입니다.

2. 우리부서에서 추진 중인 서북권패션지원센터 리모델링 공사(건축, 전기, 통신)와 관련하여 다음과 같이 준공기한 연기를 의뢰합니다.

가. 계약내용

연번	계약명	계약자	계약금액	계약기간
1	서북권패션지원센터 리모델링 공사	*******	************	2017.12.29.~2018.04.03
2	서북권패션지원센터 리모델링 전기공사	*****	***********	2017.12.29.~2018.04.03
3	서북권패션지원센터 리모델이 통신공사	*********	***********	2017.12.28.~2018.04.03

나. 의뢰내용 : 준공기한 연기(계약변경)

- 당초 : 2017.12.29./28. ~ 2018.04.03.

- 변경 : 2017.12.29./28. ~ 2018.04.20.

다. 계약금액 : 변경없음

라. 변경사유

- ***********

- *********

마. 예산과목 : (사고이월)문화산업 육성지원, 패션산업 육성지원, 서북권 봉제지원센터 조성, 시설비

붙임 : 1. 서북권패션지원센터 리모델링 준공기한 연장계획(방침) 1부.

2. 합의각서 3부.

3. 준공기한 연기의뢰서 1부.   끝.

	문화융합경제과장
실무사무관	주재영		패션산업팀장	유제우		문화융합경제과장	04/02 최판규
협조자
시행	문화융합경제과-3342	(		)	접수		(		)
우			/
전화	2133-2601	/전송	21330822	/	bonaben@seoul.go.kr	/	부분공개(5,7)