문서번호	현장민원과-5877
결재일자	2018.4.2.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		현장민원과장	강서수도사업소장
이일재		이원철	04/02 홍순성
협조	주무관		양기천
	주무관		김정운

노후 옥내급수관 교체공사비 지원 추진실적 및 향후계획

( 2018. 1/4 분기 )

2018. 4.

강서수도사업소

(현장민원과)

노후 옥내급수관 교체공사비 지원 추진실적 및 향후계획(1/4 분기)

○ 3월까지 노후 옥내급수관 교체 공사비 지원 추진실적은 6,395가구(71.1%)로 1분기 목표 900가구 초과 달성

○ 노후 공용배관 교체 적극 추진으로 2018년 목표 달성 가능( BSC 사업 )

▢ 추 진 계 획

구분	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
추진계획 수립
공동주택, 설비업체 홍보안내문 발송
구청, 동주민센터 홍보 협조요청
추진실적 분석
전화 및 방문 홍보

▢ 추진목표 및 추진실적

구분	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
목표(누계)	300	600	900
실적(누계)	578	3,174	6,395
실적/목표 (전체)	6.4%	35.3%	71.1%

▢ 홍 보 실 적

○ 2018.  2. 21. : 노후 옥내급수관 교체대상 아파트 현장방문 홍보

○ 2018.  2. 20. : 보도자료 제출 – 홍보요청(지역 언론)

- 강서까치뉴스 3월호 보도

○ 2018.  3.  7. : 홍보 안내문 우편물 발송(60개 아파트)

○ 2018.  3.  7. : 홍보 안내문 우편물 발송(218개 설비업체)

○ 2018.  3.  7. : 공사비 지원안내 협조요청(3개 구청 53개 동 주민센터)

○ 2018.  3. 30. : 홍보용 물티슈 구매

○ 2016.  3. 30. : 길훈 아파트 방문 홍보

방화동 길훈아파트	길훈 아파트 노후관(아연도강관)

▢ 분 석 결 과

○ 3월까지 노후 옥내급수관 교체공사비 지원 추진실적은 6,395가구(71.1%)로 1분기 목표 900가구 초과 달성

구 분	지원 가구수		비고
	목 표	실 적
계	9,000	6,395
공용배관	7,200	6,221
세대배관	1,800	174

○ 신청건수는 2016년 이후 매년 감소하고 있음(지원 대상 감소)

○ 노후 공용배관 공사비 지원 실적이 매우 양호하여 2018년 목표 초과 달성 가능

- 노후 공용배관 교체 추진 현황

구분	계	공사완료	공사 중	업체선정 중
아파트	9	4	2	3
가구수	8,901	6,209	1,469	1,223

- 노후 공용배관 교체공사 업체 선정 중 아파트

연번	아파트명	가구수	추진현황
	계	1,223
1	방화동 삼미	90	업체 선정 중
2	신도림 미성	837	입찰 공고 중
3	구일 우성	296	설계완료, 입찰공고 예정

○ 노후 옥내급수관 교체공사 전, 후 음용 설문조사 결과

- “보리차 등 끓인 수돗물 음용”는 공사 전 60가구 ⇒ 향후 63가구로 증가

- 노후 옥내급수관 교체공사 전 수돗물을 음용하지 않는 사유

계	수도관이 낡아서	맛이 없거나 냄새가 나서	소독이 불안해서	상수원이 깨끗하지 않아서	수돗물 부정적 인식
43	42				1

▢ 향후 추진계획

○ 노후 세대배관 공사비 지원 적극 홍보

- 컨설팅 및 교체공사비 지원 신청 후 미 교체가구 조사 및 홍보

- 컨설팅 현장 방문 시 옆집 지원 안내문 부착 등 홍보

○ 2018년 교체 예정인 아파트 공용배관 중점 추진.   끝.