위기상황에 나와 가족의 안전, ＇서울안전앱＇ 으로 지켜주세요!
	서울특별시
수신	재무과장
(경유)
제목	준공기한 연기의뢰(서북권패션지원센터 리모델링공사 감리용역)

1. 재무과-261(2018.01.03.)호와 관련입니다.

2. 우리부서에서 추진 중인 서북권패션지원센터 리모델링공사 감리용역과 관련하여 다음과 같이 준공기한 연기를 의뢰합니다.

가. 계 약 명 : 서북권패션지원센터 리모델링공사 감리용역

나. 계 약 자 : **********************

다. 의뢰내용 : 용역기간 연장

- 당초 : 2018.01.04 ~ 2018.04.03.

- 변경 : 2018.01.04 ~ 2018.04.20.

라. 계약금액 : 변경없음

마. 변경사유

- ******************************************************

바. 예산과목 : (사고이월)문화산업 육성지원, 패션산업 육성지원, 서북권 봉제지원센터 조성, 감리비

붙임 : 1. 서북권패션지원센터 리모델링 준공기한 연장계획(방침) 1부.

2. 합의각서 1부.

3. 준공기한 연기의뢰서 1부.   끝.

	문화융합경제과장
실무사무관	주재영		패션산업팀장	유제우		문화융합경제과장	04/02 최판규
협조자
시행	문화융합경제과-3339	(		)	접수		(		)
우			/
전화	2133-2601	/전송	21330822	/	bonaben@seoul.go.kr	/	부분공개(5,7)