＂마셔보면 좋은 물, 알고 보면 아리수＂ 공모당선작 우수
	광암아리수정수센터
수신자	내부결재
(경유)
제 목	공사 변경계약 결과 보고[‘17년 광암아리수 정수센터 전기설비유지보수공사-장기계속]

우리 센터에서 시행중인 공사계약건에 대하여 변경계약을 체결하고, 그 결과를 아래와 같이 보고합니다.

가. 계약건명 : 2017년 광암아리수정수센터 전기설비유지보수공사(장기계속계약)

나. 계약업체 : ㈜ 한양산전, 대표 윤용호

다. 계약변경 내역

1) 공사기한 : 2017.06.07 ~ 2018.03.31(변경없음)

2) 변경계약 체결현황(변경계약 일자 : 2018.03.30)

구 분	총 차	2차분	변경사유
계약업체	㈜ 한양산전, 대표 윤 용 호		시공물량 증· 감 발생 및 보험료 정산
공사기간	2017.06.07 ~ 2018.03.31	2018.01.01 ~ 2018.03.31
변경전 계약금액	금70,288,940원	금12,839,940원
설계변경금액(증액)	금 4,771,060원	금 4,771,060원
변경후 계약금액	금75,060,000원	금17,611,000원

붙임 : 1. 변경 계약서 1부, 2. 설계변경 내역서 1부, 3. 합의서 1부,

4. 공사계약 일반조건 1부, 5. 서울시 공사계약 특수조건 1부. 끝.

주무관							윤충용				행정관리팀장					代윤충용					광암아리수정수센터소장					04/02 윤창진
협조자
시행			행정관리팀-3250										(						)		접수												(						)
우	12989					경기도 하남시 서하남로 293																/
전화		02)3146-5312							/전송			02)3146-5309					/														/	부분공개(6)