문서번호	시설관리과-6240
결재일자	2018.4.3.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

				시 민
주무관	기전팀장	시설관리과장		강서수도사업소장
황민욱	이무규	고신석		04/03 홍순성
협 조

2018년 상수도관 전기방식공사 시행 계획

2018. 4.

강서수도사업소

(시설관리과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	■
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 여성, 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	□	■
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	■
홍 보	● 사업홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	■	□

2018년 상수도관 전기방식공사 시행 계획

우리 사업소 송·배수관 내용연수를 향상시키기 위한 2018년 상수도관 전기방식공사 시행 계획을 보고 드림.

1	추진근거

□ 본부 시설관리과-546호(2018. 1. 18.)「2018년 상수도관 전식방지사업 추진계획」

2	사업개요

□ 사업대상 : 외부전원 2개소

사업구간	수계	관경(mm)	설계도면		방식종류	비 고
			도면번호	작성연도
목12, 13단지 ~ 신트리아A사거리	목동	800	A-033	2009년	외부전원 공급방식
남부순환로 ~ 오류IC	목동	1100	A-036	2009년	외부전원 공급방식

※ 예산 배정액 : 금360,000천원(시설비 : 금325,000천원 / 감리비 : 금35,000천원)

□ 전기방식공사

❍ 공 사 명 : 2018년 상수도관 전기방식공사

❍ 공사내용 : 양극홀 4개소, 정류기함 2면, 측정함 4개소 설치 등

❍ 소요금액 : 금255,000천원

❍ 공사기간 : 착공일로부터 150일

❍ 계약방법 : 제한경쟁입찰

❍ 입찰참가자격 : 전기공사업법 제4조에 의한 전기공사업 등록 업체로써 주된 영업소가 서울특별시에 소재한 업체

❍ 예산과목 : 자본적지출, 유형자산취득, 구축물, 시설비및부대비(시설비)

□ 전기방식공사 감리용역

❍ 용 역 명 : 2018년 상수도관 전기방식공사 감리용역

❍ 소요금액(예정) : 금29,000천원

❍ 용역기간 : 착수일로부터 180일

❍ 계약방법 : 제한경쟁입찰

❍ 입찰참가자격 : 전력기술관리법 제14조에 따른 전력종합감리업 또는 전력전문감리업 등록업체로써 최근 10년 이내 지하 매설관로 전기방식공사 감리 실적이 있고, 주된 영업소가 서울특별시에 소재한 업체

❍ 예산과목 : 자본적지출, 유형자산취득, 구축물, 시설비및부대비(감리비)

3	추진일정

□ 공사 계약심사 및 용역 발주전 심의 의뢰     : 2018. 04.

□ 공사 및 용역 발주                         : 2018. 04.

□ 공사 및 용역 착공	: 2018. 05.

□ 공사 및 용역 준공                         : 2018. 09.

4	기대효과

□ 상수도관 부식방지로 내용연수 향상

□ 안정적인 아리수 공급체계 유지 및 시민에게 안정적으로 수돗물 공급

붙임  1. 설계내역서 1부.

2. 관련공문 1부.

3. 도면 1부.  끝.