위기상황에 나와 가족의 안전, ＇서울안전앱＇ 으로 지켜주세요!
	서울특별시
수신	재무과장
(경유)
제목	특수교량 낙뢰위험도 평가 및 보호방안 기술용역 준공기한 연기요청

1. 교량안전과-5715호(2018.4.3.)와 관련입니다.

2. 우리 과에서 시행중인 “특수교량 낙뢰위험도 평가 및 보호방안 기술용역”에 대하여 아래와 같이 준공기한 연기를 요청하오니 조치하여 주시기 바랍니다.

가. 준공기한 연기 내역

용 역 명	도 급 자	용역기간
		당 초	변 경
특수교량 낙뢰위험도 평가 및 보호방안 기술용역	㈜인파워이엔아이	‘18.3.12∼‘18.4.10	‘18.3.12∼‘18.5.31

나. 지체상금 : 미부과

다. 연기사유 : 세부 사유 별도 연기의뢰서 붙임

라. 예산과목 : 교량관리, 일반교량관리, 교량시설물 일상유지 보수, 시설비

붙임 1. 준공기한 연기 검토 보고서 1부.

2. 준공기한 연기의뢰서 각 1부.

3. 합의각서 각 1부.  끝.

	교량안전과장
★주무관	이노진		교량기획팀장	박동욱		교량안전과장	04/03 代박동욱
협조자
시행	교량안전과-5757	(		)	접수		(		)
우	04515	서울특별시 중구 덕수궁길 15 (서소문동) 서울시청 서소문별관 1동 2층	/
전화	02-2133-1949	/전송	02-2133-1429	/	no2001@seoul.go.kr	/	부분공개(5)