위기상황에 나와 가족의 안전, ＇서울안전앱＇ 으로 지켜주세요!
	서울특별시
수신	재무과장
(경유)
제목	용역 준공기한 변경계약 의뢰

1. 하천관리과-4843(2018.4.2.)호와 관련입니다.

2. 「홍제천 상류 자연성회복 및 경관복원 기본계획 수립용역」에 대하여 아래와 같이 용역 준공기한 변경 계약을 의뢰하오니 조치하여 주시기바랍니다.

가. 용역 개요

1) 계약기간

- 총차 : ‘16. 10.  7 ~ ’18. 4. 3

- 2차  : ‘17. 10. 16 ~ ’18. 4. 3

2) 용역사 : 동부엔지니어링(주),(주)동해종합기술공사, ㈜종합건축사사무소 다담

3) 용역비

- 총차 : 678,270천원

- 2 차 : 378,270천원

나. 준공기한 연기 내용

구 분	총차분	2차분	비고
당 초	’18. 4. 3	’18. 4. 3	용역비 변동없음
변 경	’18. 6.29	’18. 6.29

다. 연기사유

- 기본계획 완료전 투자심사를 이행하기 위해 공공투자관리센터 타당성 검증 등 사전절차 수행에 따른 절대공기 부족으로 준공기한을 연기코자 함

따로붙임 1. 준공연기 방침서 1부

2. 준공기한 연기의뢰서 1부

3. 합의각서 1부  끝.

	하천관리과장
주무관	이평주		하천계획팀장	이승우		하천관리과장	04/03 代지승현
협조자
시행	하천관리과-4936	(		)	접수		(		)
우	04520	서울특별시 중구 덕수궁길 15(서도문동) 서소문청사 1동 8층(하천관리과 하천계획팀)	/
전화	02-2133-3884	/전송	02-2133-1044	/	lpj1121@seoul.go.kr	/	대시민공개