투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시난지물재생센터
수신	내부결재
(경유)
제목	제1처리장 소화조 보수공사 설계변경(2회, 정산) 시행

우리 센터에서 시행중인 “제1처리장 소화조 보수공사”에 대하여 아래와 같이 설계변경(2회, 정산) 시행코자 합니다.

1. 공 사 명 : 제1처리장 소화조 보수공사

2. 공사기간 : 2017. 6. 26 ~ 2018. 04. 15

3. 도 급 자 : ㈜에이스디자인

4. 변경사유 : 붙임 설계변경사유서 참조

5. 예산과목 : 사업비용, 영업비용, 처리장비, 수선유지교체비,

수선유지비

6. 공 사 비

구 분	당초금액	변경금액	증‧감	비 고
총공사비	487,725,700	485,000,000	감 2,725,700
도급비	487,725,700	485,000,000	감 2,725,700

붙임 1. 설계변경 사유서 1부.

2. 설게변경 내역서 1부.

3. 수량산출서 및 도면 1부. 끝.

시설팀장	김재봉		주무관	김삼중		시설보수과장	김일운		난지물재생센터소장	04/03 정흥순
협조자
시행	시설보수과-739	(		)	접수		(		)
우	10542	경기도 고양시 덕양구 대덕로 426 (현천동)	/
전화	02-300-8590	/전송	02-300-8587	/		/	대시민공개