문서번호	급수운영과-6613
결재일자	2018.4.4.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
★주무관		주무관	급수운영과장
조승수		강동길	04/04 代이경희
협조

노후 상수도관 정비계획

(금천구 시흥1동 851-26 ~ 851-34번지 간)

2018. 4

남부수도사업소

(급수운영과)

노후 상수도관 정비 계획

(금천구 시흥1동 851-26 ~ 851-34번지 간)

시흥동 지역담당 업무 시행중 노후된 회주철관(CIP)이 발견됨에 따라 배수관 정비공사를 시행하여 적수 민원 해소 및 누수예방으로 유수율 제고에 만전을 기하고자 함

□ 급수운영과-6502(2018. 04. 04.) 보고한 내용의 수정보고건 입니다.

□ 노후관 현황

○ 위    치 : 금천구 시흥1동 851-26 ~ 851-34번지 간

○ 관로속성 : 1983/CIP/Φ80㎜로 확인

○ 배관망도

□ 보고내용

○ 상기위치에 적수 민원이 발생되어 확인 결과 노후관인 회주철관(1983/CIP/Φ80㎜)이 발견됨

○ 노후관인 회주철관(CIP)은 적수 민원이 있고, 누수발생 소지가

있어 관개량이 시급한 실정임.

□ 조치의견

○ 노후관에 대해 내식성자재인 닥타일주철관으로 교체 정비코자 하며,

○ 공사의 시급성을 감안하여「2017년 금천구 관내 상수도공사」

계약업체인 성린건설(주)(대표 최형선)에게 작업지시하여 적수 민원 및 누수를 예방하여 유수율 제고에 만전을 기하고자 함.

○ 정비계획

- 공사위치 : 금천구 시흥1동 851-26 ~ 851-34번지 간

- 공사개요 : D=150mm, L=100m

- 공사기간 : 2018. 4. 19. ~ 4. 30.

- 추정예산 : 약 15,000천원.  끝.