문서번호	시설관리과-7499
결재일자	2018.4.4.
공개여부	부분공개(7)
방침번호

		시 민
주무관	시설관리팀장	시설관리과장
권영안	이준호	04/04 김홍준

기성부분(관리)조서 검토 보고

(2017년 은평구 관내 상수도시설물 유지관리공사-2차)

2018. 4.

서부수도사업소

시설관리과

기성부분(관리) 조서 검토 보고

『2017년 은평구 관내 상수도시설물 유지관리공사(장기계속)』의 건설사업관리 기술자 ㈜이준엔지니어링으로부터 제출된 기성부분(관리) 조서 검토 보고임.

Ⅰ		공 사 개 요

○ 공 사 명 : 2017년 은평구 관내 상수도시설물 유지관리공사(장기계속)-2차

○ 계약금액 : *************

○ 계약기간 : 2017.7.6. ~ 2018.6.30.

○ 공사규모 : 노후밸브 교체 65개소, 철개굴상 및 제수변실정비  100개소, 환경정비 6개소

○ 도 급 자 : 우정기술개발(주) 대표 김정희*

Ⅱ		기 성 개 요

○ 기성기간 : `17.11.11.~`18.3.30.

○ 기성내역

계약금액	기성금액			잔액	비고
	*	기 정산	금회 정산
611,921,300	492,701,000	283,053,100	209,647,900	119,220,300

○ 공사개요

구분	공사개요	기성금액	비고
계		***********
노후밸브	노후밸브 교체 등	112,910,600	노무비 포함 (`17.12월~`18. 3월 : 4개월)
배수지	증산배수지 집수정 사다리 및 불광터널 분류 퇴수관로 설치 등	96,737,300

○ 예산과목

- 자본적지출,유형자산취득,구축물,시설비 및 부대비(노후밸브정비)

- 상수도사업비,영업비용,배급수비,수선유지교체비,기타교체비(가압장,배수지 환경정비)

Ⅲ		검 토 사 항

○ 공 종 별  산출 적정성 여부 : 적정

○ 관련사항 적정성 여부 : 적정

○ 수량산정 적정성 여부 : 적정

Ⅳ		조 치 의 견

○ ㈜이준엔지니어링 검토사항을 확인한바, 상기와 같이 기성내역이 타당하므로 기성처리코자 함.

붙 임 : 1. 기성검사(관리)조서 1부.

2. 기성(정산)내역서 1부.  끝.