투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시도시기반시설본부
수신자	건설총괄부장
(경유)
제 목	시설공사 공사기한 연장 조치 의뢰 (노들섬 특화공간 조성 토목공사)

1. 우리 부에서 시행중인『노들섬 특화공간 조성 토목공사(1차)』의 공사기한 연장을 시행하고자 하오니 조치하여 주시기 바랍니다.

가. 공 사 명 : 노들섬 특화공간 조성 토목공사 (1차 2회)

나. 변경내역

구 분	변경 전	변경 후	증·(△감)
1차 (2회)	`17.11.15~`18.4.10	`17.11.15~`18.6.14	증 65일

다. 계약방법 : 장기계속공사 1차분 공사 변경계약

라. 계 약 자 : 신성종합건설주식회사 외 2

마. 예산과목 : 공공재생계획수립, 공공개발 및 공공공간 확충(도시개발), 노들섬 문화 명소 조성사업, 시설비 및 부대비, 시설비

붙 임 :  1. 검토보고서 1부.

2. 합의각서 1부.  끝.

	토목부장
주무관	남덕희		도시고속도로과장	代박운용		토목부장	04/04 김영수
협조자	경리과장	최정수
시행	토목부-5821	(		)	접수		(		)
우	04520	서울특별시 중구 청계천로 8 프리미어플레이스 12층	/	http://infra.seoul.go.kr
전화	02-3708-8666	/전송	02-3708-2599	/	heedeok@seoul.go.kr	/	부분공개(5,7)