문서번호	조경과-4672
결재일자	2018.4.4.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		조경시설팀장	조경과장
강정호		석승우	04/04 문길동
협조

- 2018년 생활주변 자투리땅 녹화사업 –

대상지 변경(추가) 요청에 대한 검토보고

2018. 04.

조 경 과

(조경시설팀)

- 2018년 생활주변 자투리땅 녹화사업 -

대상지 변경(추가) 요청에 대한 검토보고

‘2018년 생활주변 자투리땅 녹화사업’과 관련하여 강남구에서 대상지 변경(추가) 승인요청이 있어 아래와 같이 검토보고 드림.

1		사업개요

◯ 사 업 명 : 2018년 생활주변 자투리땅 녹화사업

◯ 대 상 지 : 성동구 성수2가1동 262-2 등 5개소

◯ 규    모 : 1,008㎡

◯ 사업기간 : 2018.01. ~ 2018.11.

◯ 사 업 비 : 390백만원

◯ 사업내용 : 꽃, 유실수 등 수목식재, 쉼터 조성 등

2		요청개요

◯ 사업기관 : 강남구 공원녹지과

◯ 요청사항 : 대상지 추가에 따른 승인

◯ 추가 대상지 개요

구분	계	당초		추가	비고
대상지	3개소	2개소		1개소	1개소 추가
		남부순환로 3142-33 (동부도로사업소 앞)	압구정동 420 (미성1차 아파트 앞)	청담동 77-4 (영동대교 진입도로 녹지)
규모	430㎡	340㎡		90㎡
사업비	89백만원	89백만원

◯ 자치구 의견

- 영동대교 남단 진입로 사면 녹지대가 나대지로 노출되어 있어 영동대교 및 올림픽대로 진입로의 경관을 저해한다는 지역주민 요청사항이 많음.

- 따라서, 경관개선 및 녹지량 확충을 위해서 추가 녹화를 추진하고자 함.

3		검토결과

◯ 추가 대상지 변경(추가) 승인

- 총사업비 변경이 없는 범위 내에서, 경관개선 및 녹지량 확충을 위해 사업 대상지 추가 추진

4		행정사항

◯ 대상지 변경(추가) 승인 통보(시 → 강남구)

붙임 : 추가 대상지 승인요청 공문 1부.  끝.