문서번호	녹지관리과-1635
결재일자	2018.4.5.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관	주무관	녹지관리과장	중부공원녹지사업소장
김소연	한성규	김윤철	04/05 이춘희
협 조

2018년 봄철 광장 잔디 식재 완료 보고

2018.  3.

중부공원녹지사업소

(녹지관리과)

2018년 봄철 광장 잔디 식재 완료 보고

전년 대형 행사 등으로 훼손된 서울의 중심부인 서울광장 및 광화문 광장의 잔디를 교체 식재하고 결과를 보고 드림.

1		식재 개요

□ 식재면적 : 7,000㎡ (서울광장 6,449㎡, 광화문광장 551㎡)

□ 잔디종류 : 한지형 잔디 (켄터키 블루 그래스)

□ 추진기간 : 2018. 3. 19 ~ 3. 30

◦ 식재기간 : 서울광장 2018. 3. 26 / 3. 28 (2일), 광화문광장 2018.  3.  29

□ 작업방법 : 직영 방식

□ 작업인원 : 연인원 200명 (1일 최대 80명)

2		소요 예산

□ 소요예산 : 145,000천원

□ 산출내역

구분	수량	소요예산 (천원)	비고
계		145,000
잔디	7,000㎡	117,000	서울광장 6,449㎡ 광화문광장 551㎡
폐기물처리	360톤	15,000	건설폐재류 폐토석
장비임차	그레이더 등 5종	6,560	일상경비 교부받아 정산 지출
모래	158㎥	6,440	“

3		추진 일정

□ 2018. 3. 19 ~ 3. 25 : 폐잔디 반출 및 지반정리

□ 2018. 3. 26 ~ 3. 29 : 잔디 식재

□ 2018. 3. 29 ~ 3. 30 : 뒷정리 및 관수작업

□ 2018. 3. 31 ~ 4. 30 : 잔디 활착 위한 사용 통제

□ 2018. 5. 1 : 전면 개방

□ 2018. 5 ~ 12 : 잔디관리(급수, 비배작업 등), 부분 보식

※ 여름철 답압 피해 등 잔디 상태를 확인하여 하반기(9월) 전면 교체 판단

4		향후 계획

□ 광장 잔디의 생육 환경을 지속적으로 유지 ․ 개선할 수 있도록 관리에 철저를 기하고자 함.

붙임  1. 현황사진 1부.

2. 부대경비 세부 산출내역 1부.  끝.