문서번호	시설관리과-7529
결재일자	2018.4.5.
공개여부	부분공개(7)
방침번호

				시 민
주무관	시설관리팀장	시설관리과장		서부수도사업소장
박새롬	이준호	김홍준		04/05 박영헌
협 조
	급수운영과장		이병운
	주무관		정원형
	주무관		김용섭

2018년 소화전용 노후밸브 정비계획
2018년 소화전용 노후밸브 정비계획

2018. 4.

서부수도사업소

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	■
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
성별분리통계	● 성별분리통계 작성여부를 검토하였습니까? 예) 인적통계 남·여 구분, 수혜집단의 남·여 구분 등	□	■
일자리	● 일자리 창출 효과 및 일자리 수를 검토하였습니까? 예) 직·간접 채용, 취업알선, 전문인력양성, 창업지원 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	□	■
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	■
홍 보	● 사업 홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
정 책 영문화	● 정책 영문화 및 해외홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 영문 제목‧요약, 해외 언론 보도, 외국어 홈페이지 등	□	■
바른 우리말	● 불필요한 외국어·외래어 표현 대신 바른 우리말을 사용하였습니까? 예) 스페이스, 플랜, 앵커시설, 거버넌스, 인큐베이팅, 매칭 등	■	□
결재문서공개	● 공개 여부를 “비공개”로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? 예) 정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호	■	□

2018년 소화전용 노후밸브 정비계획

소방재난본부에서 관리하는 소화전용 노후밸브를 체계적으로 정비하여 작동불량 및 녹물출수를 방지하고 깨끗한 아리수 공급과 시민 안전에 기여하고자 함

Ⅰ				관 련 근 거

❍ 소방재난본부 재난대응과-23201(‘17.11.3.)

- 노후 소화전 밸브 교체 계획

❍ 본부 시설관리과-1977(‘18.3.6.)

- 소화전용 노후밸브 정비계획

Ⅱ				현 황

□ 서부수도사업소 관내 소화전 현황

❍ 소화전 6,626개소 중 1,532개소가 노후밸브(23.1%)

구 분	서울시 전체	계(서부)	서대문구	마포구	은평구
소화전	59,466	6,626	2,134	2,430	2,062
노후밸브	14,108	1,532	569	578	385

※ 소화전용 노후밸브 : 1994년 이전에 설치된 회주철 재질의 밸브

□ 소화전용 노후밸브 문제점

❍ 매년 2회(상‧하반기) 실시하는 소방서의 소화전 점검시 녹물 출수 민원 다수 발생

❍ 노후 배급수관, 송배수관 정비시 소화전 정비를 별도 시행하여 중복굴착으로 민원 및 예산낭비 발생

노후 소화전용 노후밸브	소화전용 노후밸브 내부	소화전 녹물 출수

Ⅲ				소화전용 노후밸브 정비계획

□ 2018년도 소화전용 노후밸브 정비계획

❍ 구별 정비 목표

구 분		계	급수운영과		시설관리과	비고
			서대문구	마포구	은평구
목표 물량	계	159	58	54	47
	단가계약 정비	145	50	50	45
	단위사업 정비	14	8	4	2
예산(천원)		190,800	69,600	64,800	56,400	자재센터 예산 별도 배정

□ 소화전용 노후밸브 정비방법

❍ 소화전용 노후밸브 정비공사 흐름도

예산 배정 및 재배정		정비대상 협의		소화전 정비요청		소화전 정비
(본청→재난방재본부→소방서)		(수도사업소, 소방서)		(소방서→사업소)		(수도사업소)

❍ 정비 목표 연도인 2027년까지 소화전용 노후밸브 정비완료

- 소방재난본부로부터 매년 별도 예산 지원받아 정비

❍ 단위사업 시행시 노후관에 연결된 소화전용 노후밸브는 단위사업 공사에 반영하여 정비

❍ 내식성관에 연결된 소화전용 노후밸브는 사업소에서 진행중인 단가계약 공사에 반영하여 정비

❍ 소화전용 노후밸브 정비에 따른 효과분석 실시

- 과별 5개소씩 선정하여 소화전용 노후밸브 정비 전‧후 수질검사 비교분석

- 노후관과 병행 정비시 예산절감액 분석

❍ 적벽돌 쌓기가 생략된 지하식 소화전실(축소형) 설치로 예산절감 및 시공기간 단축

Ⅳ				기 대 효 과

❍ 노후밸브로 인한 작동불량 해소 및 녹물출수 방지

❍ 노후관과 소화전 정비를 병행하여 민원방지 및 예산절감

❍ 소화전 맨홀 정비하여 단차 개선으로 맨홀 소음 감소

Ⅴ				행 정 사 항

❍ 관할지역 소방서와 협의하여 정비대상 선정

❍ 신속한 정비로 상반기 중 예산 조기집행 60% 달성

- 작년도 10억이상 조기집행 대상 사업 중 목표미달 특별관리 대상으로 선정되었음을 감안

❍ 정비 후 각 소방서에 통보

❍ 추진실적 및 향후계획을 분기별로 익월 4일까지 시설관리과 수합 본부보고 (첨부 2)

❍ 소화전용 노후밸브 정비의 배정된 예산은 소화전 설치 및 보수 예산과 같은 통계목(시설비)이나 구분하여 예산 집행

- 예산과목 : 소방용수시설 등의 설치 및 관리, 소방용수시설 설치 및 보수, 시설비

- 단위사업 공사 시행 중 소화전용 노후밸브 정비시에도 자재출고, 정산시 상기 예산으로 집행

붙 임 : 1. 소화전용 노후밸브 배정예산 및 정비대상현황 1부.

2. 소화전용 노후밸브 정비실적 제출양식 1부.

3. GIS상 소화전 노후밸브 현황 1부.  끝.