문서번호	계약심사과-6481
결재일자	2018.4.5.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		심사총괄팀장	계약심사과장
이용성		류종기	04/05 안호
협 조
	설비심사팀장			최주용
	전문관			임장경

’18년 3, 4호선 강체전차선로 개량공사 설계VE·공사원가 통합심사 실행계획

2018. 04.

계약심사과

’18년 3, 4호선 강체전차선로 개량공사

설계VE·공사원가 통합심사 실행계획

서울교통공사에서 시행하고 있는『’18년 3, 4호선 강체전차선로 개량공사』에 대하여 심사전탐팀을 구성하고 설계VE·공사원가 심사계획을 수립하여 추진하고자 함.

1		추진근거

□ 건설기술진흥법 시행령 제75조

□ ’18년 설계경제성(VE) 심사 운영계획(계약심사과-579, ’18.1.11)

2		심사개요

□ 추진부서 : 서울교통공사 전기1사업소

□ 용  역  명 : ’18년 3, 4호선 강체전차선로 개량공사

□ 위    치

○ 지하철 3호선 : 구파발 터널입구~오금역 등(L=77km)

○ 지하철 4호선 : 쌍문터널입구~남태령 등(L=53km)

□ 사업내용 : 30년이상 노후된 강체전차선 개량

○ 지지철물 10,873조 개량

○ AL T-BAR 재용접 및 254개소 수평조정 등

□ 공 사 비 : 5,582백만원

□ 설계기간 : ’17.07. ~ ’18.05.

□ 설계공정률 : 90%

3		심사계획

□ 주요 심사내용

○ 건설공사의 설계, 시공, 유지관리 등 경제성 분석

○ 공사 시행의 적정성 및 사용자 편의성

○ 시설물 안전 및 고효율 공법 적용의 가능성

○ 설계예산서 도서간 일치 여부 및 공사원가 적정성 등

□ 시행방법 : 전담팀 구성하여 심사

○ 전담팀 : 이해관계자, 유지관리부서 포함 15명 내외

구 분	구 성 내 용	역 할
VE책임자 (3명)	▸외부 설계VE 전문가 3명 - (CVS) 천용민 대표 ㈜무한리더스 - 진행 및 보고서 작성 2명	설계경제성 심사 업무 진행 심사결과 종합 결과보고서 작성
VE담당관	▸ 이용성 주무관 계약심사과	총괄 및 결과보고서 정리
팀원(5명)	▸ 외부 전문가 4명 - (전기안전) 임맹택 실장 한국안전본부 - (전기송변전) 지성호 대표 한주엔지니어링 - (전기철도) 김양수 교수 한국교통대학교 - (토목구조) 신용석 부원장 한국시설안전 ▸ 내부 공무원 1명 - (전기) 정대진 주무관 계약심사과	기능 분석 기술 검토 아이디어 제안 아이디어 평가 제안서 작성 공사원가 분석, 정리 등
유지관리부서 (이해관계자)	▸ 이봉기 부장 전기1사업소 전차선과 ▸ 황도식 소장 전기1사업소 지축전기사업소	유지관리 특이사항 설명
발주부서	▸ 한성철 차장 전기1사업소	사업설명, 제안서 검토
설계자(3명)	▸ 한성철 차장 등 (자체설계)	사업설명 등 (설계내용, 현장설명 등)

□ 설계경제성 심사 시행절차

구분		추진 일정		검토 절차		업무 내용
계획수립		’18.04.04		설계경제성 심사 신청 (사업부서)		▸심사 신청서 접수
		’18.04.05		설계VE․공사원가 통합심사 계획수립 (VE담당관)		▸추진일정, 시행방법 등 ▸설계VE팀 구성
설 계 VE ․ 공 사 원 가 통 합 심 사 운 영		’18.04.06 ~ ’18.04.20 (3일차~15일차)		설계VE 검토회의 【설명회,워크숍,이행회의】 (VE 전담팀)		▸자료 사전검토 ▸현장 확인 및 사업설명 ▸1,2차 검토회의 - 아이디어제시, 결과이행 회의 - 설계도서(예산서) 형식 검토 ▸최종 검토회의 : 의사결정
		’18.04.23 (16일차)		VE 제안서 통보 (계약심사과 → 사업부서)		▸VE 제안서 통보
		’18.04.25 (20일차)		설계도서 수정 및 제출 (사업부서 → 계약심사과)		▸제안서를 반영하여 설계도서 수정
		’18.04.26 ~ ’18.05.08 (33일차)		공사원가 심사 (계약심사과)		▸분야별 원가심사 ▸설계VE 결과보고서 작성
		’18.05.09 (34일차)		통합심사 결과통보 (계약심사과 → 사업부서)		▸심사결과 통보

□ 설계VE․공사원가 통합심사 회의 세부일정

일 시	내 용
’18.04.11(수) 14:00~17:00	- 사업설명 및 현장답사 ‣ 장소 : 계약심사과內 회의실 및 수서차량기지 현장
’18.04.16(월) 10:00~17:00	- 1차 검토회의 : 대안 구체화, 설계도서 형식검토 ‣ 장소 : 계약심사과內 회의실
’18.04.17(화) 10:00~17:00	- 2차 검토회의 : 대안에 대한 가치평가 및 분석 ‣ 장소 : 계약심사과內 회의실
’18.04.20(금) 14:00~18:00	- 최종 검토회의 : 제안 채택회의, 설계도서 보완알림 ‣ 장소 : 계약심사과內 회의실
’18.04.25(수) 18:00 까지	- 설계도서 수정본 제출 (서울교통공사 ⇒ 계약심사과)
’18.05.09(수) 18:00 까지	- 설계VE․공사원가 통합심사 결과 통보

4		소요예산

□ 소요예산 : 10,721천원

○ 외부전문가 수당 : 10,221천원

— 리더(기술사+보고서작성)   : 2,689천원(2,689천원 × 1명)

— 위원(기술사)                : 5,488천원(1,372천원 × 4명)

— 퍼실리테이터(중급기술자) : 2,044천원(1,022천원 × 2명)

※「설계경제성심사제도 운영현황 및 개선방안」(계약심사과-10559(’15.6.15))에 따라 산출

○ 회의다과비 등 운영비 : 500천원

□ 예산과목

○ 신청부서(서울교통공사)에서 위원수당 지급

○ 계약심사과에서 회의운영비 지급

5		향후계획

□ 설계VE․공사원가 통합심사 결과 통보  -----  ’18.5.9.

붙 임 : 1) 설계경제성 심사 요청 공문 1부.

2) 설계경제성 심사 신청서 1부.  끝.