문서번호	도로보수과-3217
결재일자	2018.4.6.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		주무관	도로보수과장
최송천		이상하	04/06 강종훈
협조

효창제4구역 주택재개발정비사업

협의사항(도로) 검토 보고

2018. 04.  .

서부도로사업소

(도로보수과)

효창제4구역 주택재개발정비사업

협의사항(도로) 검토 보고

용산구 백범로에 연접하여 시행하는 ‘효창제4구역 주택재개발정비사업’에 대하여 도로법에 의한 협의 사항에 대한 검토 보고 임.

□ 관련 근거

○ 도로보수과-307호(2018.1.11.) 및 재정비사업과-1761호(2018.3.7.)

□ 사업 개요

○ 사 업 명 : 효창 제4구역 주택재개발 정비사업

○ 위    치 : 용산구 효창동 117-1번지 일대

○ 면    적 : 10,030㎡

○ 건축규모 : 지하3층/지상18층 아파트 3개동 199세대

○ 시 행 자 : 효창4구역 재개발 조합(712-1107)

○ 시 공 사 : 케이씨건설(719-9330~1)

○ 감 리 자 : 신성종합건축사사무소

□ 추진 경과

○ 2006.10.26. : 정비구역지정

○ 2010.04.19. : 조합설립인가

○ 2012.01.19. : 사업시행인가

○ 2016.05.09. : 착공신고처리

○ 2018.04.06. : 현재 내외부 마감공사 중

○ 2018. 09월  : 준공예정

□ 보고 내용

○ 공사 중 도로 포장 관리 계획 : 적정

- 관리 계획 : 공사 중 주 2회 순찰 및 정비

- 관리 범위 : 폭 10.5m, 길이 200m

○ 공사 후 도로 포장 계획 : 적정

- 합동 점검 : 공사 준공 2개월 전

- 상태 확인 : 서울시 포장연구센터 검사 의뢰

- 포장 범위 : 합동 점검 및 상태확인 결과에 표층 또는 지반 개량 범위 등 결정

- 포장 방법 : 서울시 특별시도 포장 기준에 의함

- 시행 주체 : 효창4구역 주택재개발정비사업조합

○ 각종 인입시설 검토 : 적정

- 종     류 : 도시가스, 상수도, 통신, 전기, 우수관로

- 시행 검토 : 도시가스(6월 중순), 상수도(3월말), 통신(KT, 6월 중순), 전기(4월초), 우수관로(3~6월)

○ 지하매설물 처리 계획(보도) : 적정

- 종     류 : 도시가스, 상수도, 통신, 전기, 우수관로, 옹벽

- 심     도 : 도시가스(1.2m), 상수도(1.2m), 전기(1.2m), 우수관로(1.0m)

- 옹     벽 : 완전제거(L=22.6m)를 원칙으로 하되 각종 지장물에 의해 완전제거가 어렵다고 판단될 경우 서부도로사업소와 협의하여 최대한 제거한다.

□ 향후 계획

○ 협의에 대한 회신 및 지속적 순찰 등 관리

붙 임 : 1) 효창제4구역 주택재개발정비사업 협의 1부.

2) 협의 도서                           1부.  끝.