투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서부도로사업소
수신자	관리단속과장
(경유)
제 목	관급자재 납품기한 연장 요청(사천교 성능개선공사 도막형바닥재)

우리 과에서 시행중인 ‘사천교 성능개선공사’와 관련하여 현장의 아래 관급자재의 납품기한 연장을 요청하오니 조치하여 주시기 바랍니다.

- 아  래 -

가. 납품요구번호 : 12-17-1-84353-00

나. 품명 및 규격 : 도막형바닥재 (조광페인트,ROAD-CRETE S500, t2mm, 열경화성수지/MMA)

다. 물품식별번호 : 22900900

라. 계 약 자 : 주식회사 청풍건설

마. 당초 납품기한 : 2018. 3. 2

바. 납품기한 연장 : 2018. 5. 30

사. 연장사유 : 교량 확장부 상면 구배 조정 등을 위해 아스콘 추가 포설하는 것으로 시공방법이 변경되어 ‘18.4월말 이후 설치 예정임.  끝.

	시설보수과장
주무관	이동섭		주무관	권순회		시설보수과장	04/06 代권순회
협조자
시행	시설보수과-2749	(		)	접수		(		)
우	03918	마포구 가양대로 203 서부도로사업소 시설보수과	/
전화	02-300-8374	/전송	02-300-8384	/	lds0420@seoul.go.kr	/	대시민공개