투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시도시기반시설본부
수신자	건설총괄부장
(경유)
제 목	중랑물재생센터 3차(총인)처리시설 설치사업 감독 권한대행 등 건설사업관리용역 변경계약 의뢰

1.「중랑물재생센터 3차(총인)처리시설 설치사업 감독 권한대행 등 건설사업  관리용역(총괄 1회․1차 1회)」에 대한 변경계약을 아래와 같이 의뢰하오니 처리하여 주시기 바랍니다.

가. 용 역 명 : 중랑물재생센터 3차(총인)처리시설 설치사업 감독권한대행 등 건설사업관리용역

나. 용 역 비 : 총차 2,134,104천원(1차 600,000천원)

다. 용역기간 : 총차 2017.06.19. ~ 2019.10.06.

1차 2017.06.19. ~ 2018.04.14.

라. 용역업체 : ㈜천일 대표이사 김창욱 외 3

마. 변경사유 : 용역 착수 연기에 따른 용역기간 변경

바. 예산과목 : (공기업하수도특별회계) 물순환안전국, 물재생시설과, 자본적지출, 비가동설비자산취득, 건설중인자산, 시설비및부대비, 감리비, 물재생시설개선, 중랑물재생센터 3차(총인)처리시설 설치

사. 변경내역

(단위 : 원)

구분		당초	변경	증․감
용역 금액	총괄	2,134,104,000	2,134,104,000	변경없음
	1차	600,000,000	600,000,000	변경없음
용역 기간	총괄	2017. 06. 19. ～ 2019. 10. 06.	2017. 06. 19. ～ 2019. 10. 06.	변경없음
	1차	2017. 06. 19. ～ 2018. 04. 14.	2017. 06. 19. ～ 2018. 07. 31.	증) 108일

붙 임 : 1) 방침서 1부.

2) 변경내역서(총괄 1회․1차 1회) 각 1부.

3) 합의각서 1부.  끝.

	방재시설부장
전문관	조양호		환경시설과장	장수철		방재시설부장	04/06 이임섭
협조자	경리과장	최정수
시행	방재시설부-4492	(		)	접수		(		)
우	04520	서울특별시 중구 청계천로 8(무교동 96번지) 프리미어플레이스빌딩 14층	/
전화	02-3708-8784	/전송	02-3708-8756	/	cyh2466@seoul.go.kr	/	대시민공개