문서번호	토목부-6049
결재일자	2018.4.9.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
★주무관		교량건설과장	토목부장
노순재		박용택	04/09 김영수
협조
	주무관		김동현

목재 데크(계단부) 변경 실정보고

(중랑천 초안산 앞 보행교량 설치 공사)

2018. 4.

도시기반시설본부

(토 목 부)

목재데크(계단부) 변경 실정보고

- 중랑천 초안산 앞 보행교량 설치공사 -

목재데크가 강판에 직접고정방식으로 설계되어, 배수에 문제가 있어  파이프와 강재 고정방식으로 변경하여 내구성 향상 및 안전사고를 예방

코자 보고드림          ※ 관련근거 : 대콘(초안산) 제18-78호(‘18. 03. 27.)

Ⅰ		공사개요

○ 공 사 명 : 중랑천 초안산 앞 보행교량 설치공사

○ 공사규모 : 보행교량 설치(폭 4.5m, 연장 191m)

○ 도 급 비 : 6,454백만원(3차: 1,814백만원)

○ 공사기간 :′16.4.29 ~ ′18.4.28

○ 시 공 사 : 한양산업개발㈜

○ 감 리 사 : ㈜대한콘설탄트외 1

Ⅱ		실정보고 내용

○ 초안산 보행교량의 계단의 목재데크가 하부강판에 바로 고정토록 되어 있어 목재데크 하부로 배수지연에 따른 물고임으로 내구성 저하 및 우천시 이용자의 안전사고 우려가 있어,

○ 교량상판의 목재데크와 동일하게 알루미늄 파이프 지지대와 앵글로

데크를 고정하여 배수를 원활히 하여 내구성 향상 및 안전사고 예방

○ 동부간선도로 하부 투석 방지망 설치(위치도)

목재데크(계단) 설치위치

○ 계단부 목재데크 설치 변경 검토

- 당초 : 강판 상부 목재데크를 나사로 직접 고정

목재와 강판사이 배수문제로 내구성 저하 및 안전사고 우려

- 변경 : 알루미늄 파이프와 앵글위에 목재데크 고정

체수방지로 내구성 향상 및 안전사고 발생 해소

※ 교량상부 목재데크는 파이프와 앵글로 고정하여 계단부도 같은방식 적용

당 초	변 경 (교량슬래브 목재테크와 동일공법 적용)
면적 : A=280㎡	면적 : A=280㎡
장점 : 공사비 저렴, 시공 간편 단점 : - 배수 불량으로 강판 부식 및 목재데크 내구성 저하 - 동절기 결빙시 이용객 안전사고 발생 우려 도급단가 : 246,430원	장점 : 하자발생차단 - 계단 강판 및 목재데크 부식 방지 - 배수처리 양호하여 동절기 결빙으로 인한 안전사고 방지 단점 : 공사비 고가[AL PIPE 설치 및 용접] 도급단가 : 317,040원[교량부 단가 적용]

Ⅲ		수량 및 단가검토

○ 변경 수량 및 금액                                     (단위: 천원)

(단위:천원)
구 분	규 격	단위	당 초			변 경			(증.감)	비 고
			수 량	단 가	금 액	수 량	단 가	금 액
목재데크	교량부	㎡	764	317	242,218	764	317	242,218	-
	계단부	㎡	280	246	69,000	280	317	88,771	19,771
제 경 비			-		109,532			115,149	5,617
공 사 비			-		420,750			446,138	25,388

※ 기존 교량부 단가 적용

Ⅳ		조치계획

○ 배수에 문제가 있는 목재데크 직접고정 방식에서, 교량부와 같이 앵글과

파이프 지지로 변경 설치하는 건설사업관리단 실정보고 사항을 승인 조치

하고 추후 설계 내역에 반영코자 함

붙  임 : 건설사업관리단 검토 의견서 1부. 끝.